문서번호	토목부-346
결재일자	2014.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
정문수		최순철	전결 01/08 노우성
협조

폐기물처리 용역업체 변경 보고

( 선사로~고덕지구간 도로확장공사 폐기물처리용역 )

2014.  1.

서울특별시도시기반시설본부

( 토 목 부 )

폐기물처리 용역업체 변경 보고

( 선사로~고덕지구간 도로확장공사 폐기물처리용역 )

현재 용역 수행 중인 『선사로~고덕지구간 도로확장공사 폐기물처리용역』의 폐기물 수집운반 업체 변경에 대한 조치 계획을 보고하는 내용임.

※ 계약변경 현황 : 당초) 수집운반(삼흥환경)   +   중간처리(금강도시환경)

⇒ 변경) 수집운반(금강도시환경) + 중간처리(금강도시환경)

□ 관련근거 : 삼흥 기획14-02호(2014. 1.  ), 금강2014-02호(2014. 1. 6)

□ 용역개요

◦ 용 역 명 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사 폐기물처리용역

◦ 용역기간 : ′09. 7.23 ~ ′13.12.31 (4차 : ′12. 3.15 ~ ′13.12.31)

◦ 용역금액 : 금1,278,916천원 (4차 : 300,000천원)

◦ 용역업체 : 삼흥환경(주) 채만석 - 수집운반,  도시환경산업(주) 채만석 - 중간처리

□ 보고내용

◦ 상기 용역과 관련하여 “선사로~고덕지구간 도로확장공사”에 대한 폐기물 처리 용역을 ′09. 7.23 착수하여 수행 중 폐기물 수집운반 업체인 "삼흥환경(주)"으로부터 회사 사정로 인하여 계약 해지 요청에 따라 폐기물 수집운반업체의 변경이 필요한 실정임.

□ 조사내용

◦ 근 거 : 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 “공동수급표준협정서“ 제13조(중도탈퇴에 대한 조치)

▶ 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

※ 관련근거

․ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준

: 제7장 공동계약 운영요령 3절 8-나-2 (안전행정부예규 제21호, ‘13. 9. 19)

․ 안전행정부 유사민원 답변 자료

◦ 잔존 구성원의 용역수행 적정여부 검토

- 대 상 : 금강도시환경(주)  이 상 훈

- 면 허 : 건설폐기물 수집운반업 허가증 (양주시 제2002-3호)

- 계약이행 능력 : 건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준 적용

(환경부고시 제2008-163호 : 2008.11.14)

․ 적격심사 평가결과 : 적 격

대상업체	평 가 결 과						적 격 기 준
	계	당해용역수행능력(40점)		입찰가격	신인도	결격여부
		이행능력	경영상태
	100	30	10	60	△6	△45	95점이상
금강도시환경(주)	95.38	29.9	9.40	56.08	-	-	95.38

□ 폐기물용역 변경 내역

◦ 폐기물용역 계약 현황

구 분	총 차	1차 ~ 3차	4 차	장 래
금액(천원)	1,278,916	724,898	300,000	254,018
용역기간	‘09.07.23 ~‘13.12.31	‘09.07.23 ~’12. 2.39	‘12. 3.15~‘13.12.31	‘14. 1 ~ ‘14.12
		완 료	진행 중	미완료

◦ 폐기물용역 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
용역비	전 체	1,278,916,000	1,278,916,000	-	변경없음
	4 차	300,000,000	204,457,000	감)95,543,000	내역변경
용 역 기 간	전 체	′09. 7.21~′13.12.31	′09. 7.21~′14.12.31	12개월	기간연장
	4 차	′13. 3.15~′13.12.31	′13. 3.15~′13.12.31	-	변경없음

□ 조치계획

◦ 상기와 같이 건설폐기물의 원활한 처리를 위하여 잔존 구성원으로 “건설폐기물 수집운반업 허가” 업체인 금강도시환경(주)과 변경계약을 시행하여 폐기물 처리에 만전을 기하고자 하며,

◦ 현재 진행 중인 폐기물처리용역(4차)에 대하여 실제 폐기물 처리물량에 의거 설계변경을 시행하여 정산 처리하고자 합니다.

첨부 : 1. 계약자 공문 1부

2. 계약서 1부.

3. 용역 포기 공문(삼흥환경) 1부.

4. 합의서 1부.

5. 적격 심사 결과 1부.

6. 관련근거 각1부.  끝.