문서번호	토목부-21468
결재일자	2015.10.14.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
한병찬		진재섭	10/14 노우성
협조

아천IC 미개통 램프 개통에 따른 교통안전시설 설치 검토 보고

- 구리암사대교 건설공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

아천IC 미개통 램프 개통에 따른 교통안전시설 설치 검토 보고

아천IC 미개통 램프 개통에 따른 관계기관(구리경찰서 등)협의 내용에 의해 교통안전시설 설치 검토 보고임.

※ 암사(감리)2015 - 544호(’15.10.13.) : 아천IC 미개통램프 개통에 따른 교통안전시설 설치

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설공사

○ 규    모 : 교량건설 폭 4∼6차로, 연장 1.13㎞

○ 계 약 액 : 192,599백만원(15차 18,517백만원)

○ 공사기간 : ’06.4.5. ∼’15.10.30.(15차 ’14.12.11.∼’15.10.30.)

○ 시공사 및 감리단 : 현대건설㈜, ㈜도화엔지니어링외 1개사

□ 감리단 보고내용

○ 추진경위

- 2014.11.21. : 교량 본선 및 아천IC 일부 임시개통

- 2015.02.∼05. : 아천IC 일대 교통영향분석 시행

- 2015.04.07. : 구리경찰서 방문 협의

- 2015.04.16. : 전문가 현장 자문회의 개최

- 2015.04.28. : 관계기관(구리경찰서,구리시,도기본)합동회의 개최

- 2015.05.01. : 아천IC 미개통 램프 개통을 위한 협의(구리경찰서,구리시)

- 2015.05.18. : 구리암사대교 아천IC 시설운영방안 검토보고(본부장)

- 2015.06.29. : 아천 IC 미개통 램프 개통(전 구간 개통)

- 2015.06.30. : 관계기관 현장 합동점검(구리경찰서,구리시,도기본,용마터널)

- 2015.07.21. : 평면교차로 신호등 및 안전시설 보완 요구(구리경찰서)

- 2015.08.24. : 안전시설 추가 보완 요구(구리경찰서)

○ 교통안전시설 주요내용

구분	시 설 명			비고
평면교차로 (Ramp-K,L)	교통안전지대 → 교통섬		2개소
	신호등	LED, 1면3색	14조	종형식 및 예고신호등 포함
	차선규제봉(200×80×750)		227개
	안전표지판(속도제한,지시표지 등)		28개
강북삼거리	가드레일 설치		123m
	신호등	LED, 1면4색	2조
		LED, 1면3색	2조
	차선규제봉(200×80×750)		61개
	그루빙(3개소)		9m
	안전표지판(갈매기표지 등) 및 경광등		11개
국도43호선	중앙분리대(화단) → 좌회전 차로 운영		250m
	신호등	LED, 1면4색	4조
		LED, 1면3색	3조
	차선규제봉(200×80×750)		167개
	안전표지판(갈매기표지 등)		6개

구분	시 설 현 황 도
평면교차로
국도43호선
강북삼거리

○ 소요 공사비

(단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증․감	비고
교통안전시설 보완	-	280,000	증)280,000
도급비	-	280,000	증)280,000
폐기물처리비	-	6,000	증)6,000
관급비	-	35,000	증)35,000
총공사비	-	321,000	증)321,000

※ 적용단가 : △ 수량 증·감 → 기계약 단가, △신규단가 → 협의율 적용(85.367%)

○ 감리단 검토의견

- 아천IC 미개통 램프 개통에 따른 관계기관(구리경찰서,구리시) 협의 결과에 의해 교통안전시설 보완 설치하는 사항으로 본부 설계변경위원회 자문을 거쳐 설계에 반영하는 것은 타당함.

□ 조치의견

○ 상기 감리단 검토내용과 같이 ‘아천IC 미개통 램프 개통에 따른 교통안전시설 보완’설치에 따른 실정보고건에 대해 승인하고 추후 본부 설계변경위원회 자문 및 설비부 검토의견을 설계변경시 반영하되 실시공 수량에 의한 정산에 철저를 기하도록 조치코자 함.

- 아천IC 미개통 램프 개통에 따른 교통안전시설 보완 : 증)321백만원

붙  임 : 감리단 실정보고 및 검토의견서 1 부.  끝.