문서번호	도로보수과-10111
결재일자	2015.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
최병수		이석재	10/14 노영석
협조

2015년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)

설계변경 시행계획(2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

도로보수과

「2015년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)」

설계변경 시행계획(제2회)

우리사업소에서 시행중에 있는「2015년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)」와 관련하여 포장파손, 침하, 소성변형, 거북등 균열 발생에 따른 정비물량이 변경되어 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

1. 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-북부

○ 공사개요 : 소규모포장복구 34a, 절삭 덧씌우기 287a, 출동 150개소

○ 공 사 비 : 1,462,092,000원

- 도급비 911,068,000원, 관급비 511,024,000원, 이전비 40,000,000원

○ 공사기간 : 2015. 4. 3. ~ 2015. 12. 31.

○ 계약상대자 : 에이치에프건설(주) 대표 황 행 묵

2. 설계변경 사유

○ 포장 불량구간 정비에 따른 공종별 정비물량 조정

- 당초 : 소규모 포장복구 34a, 절삭 덧씌우기 287a, 출동 150개소

- 변경 : 소규모 포장복구 88a, 절삭 덧씌우기 319a, 출동 23hr

○ 주요 변경 내용

구 분	규격	단위	당초	변경	증․감	비고
절삭후덧씌우기	야간,t=5cm	a	236	283	증 47
절삭후덧씌우기	야간,t=10cm	a	44	36	감 8
소규모포장복구	야간,5~20cm	a	34	88	증 54
절삭후덧씌우기	야간,t=20cm	a	7	3	감 4
포장장비 수송	포장장비 이동	회	30	37	증 7
긴급소파보수(출동)	주간 및 야간	hr	0	23	증 23

3. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총공사비	1,462,092,000	1,700,000,000	증)237,908,000
도 급 비	911,068,000	1,366,970,000	증)455,902,000
관 급 비	511,024,000	333,030,000	감)177,994,000
이 전 비	40,000,000	-	감) 40,000,000
낙찰차액	84,186,000	-	감) 84,186,000
미집행잔액	153,722,000	-	감)153,722,000

4. 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 설계변경 시행후 공사추진에 철저를 기하고자 함.

따로붙임 : 변경내역서 1부.  끝.