문서번호	도로보수과-7484
결재일자	2015.10.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	도로보수과장
정용재	송광석	10/14 김환겸
협 조

논현로75~84번지 중앙분리대 추가구매 및 충격흡수시설 설치계획 보고

『도로·교통안전부속물 유지보수공사』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

『도로·교통안전 부속물 유지보수공사』

논현로75~84번지 중앙분리대 추가구매 및 충격흡수시설 설치계획 검토 보고

우리사업소 관내 도로·교통안전부속물 유지관리를 위해 논현로 75~84번지 구간에 서울시 교통규제심의에 따라 중앙분리대를 설치하고자 자재구매 하였으나, 중앙차선 폭 확장 및 구간이 연장되어 중앙분리대를 추가구매하고, 관할경찰서에서 충격흡수시설설치를 요구하여 충격흡수시설은 조달청에 등록이 되어 있지 않아 수의계약하고자 함.

	1		자재구매 현황

○ 공 사 명 : 2015년 도로·교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)

○ 위    치 : 논현로 75~84번지

○ 설치기간 : 2015. 8. 13 ~ 2015. 10. 31

○ 구매내역 : 중앙분리대 22경간(8,272,000) 및

단부2개소(284,000)

	2		변경 내역

○ 당 초 : 구간길이 74m, 중앙분리대 22경간(8,272,000) 및                  단부2개소(284,000)

○ 변 경 : 구간길이 124m, 중앙분리대 39경간(14,664,000) 및

단부4개소(568,000)

○ 추가소요액 :6,392,000+284000=6,676,000원

3	수의계약 내용

○ 사 유 : 관급자재로 구매코자 하였으나 현재 충격흡수시설 전 품목이 조달물품에 등록이 되어 있지 않음.

○ 신설물량 : 충격흡수시설 2개 – 6,270,000원

(길이 2,450mm, 폭 600mm, 높이1000mm)

○ 계약대상자: 도로·교통안전 부속물 유지보수공사(연간단가) 사업예산을 활용하여 저가의 견적서를 제출한 신도산업(주)와 수의계약을 체결하여 신설하고자 함.

○ 소요예산 : 충격흡수시설 2개

	3		조 치 계 획

○ 상기와 같은 내용으로 자재 변경구매하여 우리사업소에서 시행하고 있는『2015년 도로·교통안전부속물 유지보수공사』 계약업체에 작업지시하여 도로·교통안전부속물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 1. 인터넷 쇼핑몰 내역 1부.

2. 견적서 1부.

3. 산출기초조사서 1부. 끝.