문서번호	토목부-21501
결재일자	2015.10.14.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	광역도로과장	토목부장		시설국장
한병찬	진재섭	노우성		10/14 형태경
협 조

구리암사대교 설계변경(계약금액 및 기간연장)검토 보고

- 구리암사대교 건설공사 -

2015. 10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	구리시,수방사
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

구리암사대교 설계변경(계약금액 및 기간연장)검토 보고

‘구리암사대교 건설공사’에 대한 실정보고 등 현장여건 변동사항을 반영한 계약금액 변경과 군·경 합동검문소 등 관계기관 협의 지연, 추가공사 발생에 따른 공사기간 연장에 대한 검토사항을 보고 드림.

1		관련근거

□ 아천IC 평면교차로 교통사고 예방을 위한 안전시설 추가보완 요구

- 무인교통단속장비(5대)등 안전시설(구리경찰서 : 2015.9.11.)

※ 구리경찰서 및 경기지방경찰청 협의 등 설치기간 소요(약 3개월)

□ 아천IC 교통광장 유지관리기관 결정 지연에 따른 제설작업 시행 통보

- 아천 IC 램프 제설작업 시행 통보(도로계획과 : 2015.10.8.)

※ 제설범위 : △ (도기본) 아천IC 램프, △ (동부도로사업소) 본선 교량 및 암사IC 램프

□ 계약 금액 및 기간 변경 요청 : 감리단 및 계약자(2015.10.)

2		공사현황

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설공사

○ 규    모 : 교량건설 폭 4∼6차로, 연장 1.13㎞

○ 계 약 액 : 192,599백만원(15차 18,517백만원)

○ 공사기간 : ’06.4.5. ∼’15.10.30.(15차 ’14.12.11.∼’15.10.30.)

○ 시공사 및 감리단 : 현대건설㈜, ㈜도화엔지니어링외 1개사

□ 주요 추진경과

○ 2014.11.20. : 임시개통 (교량 본선 및 암사IC, 아천IC 일부)

○ 2015.06.29. : 전 구간 개통 완료

○ 2015.10월 현재 : 암사 및 아천IC 둔치 시설물 복구 마무리 중

‣ 아천IC 평면교차로 무인교통단속시설 추가설치 요구사항 협의 중(구리경찰서)

‣ 동절기 제설대책(아천IC 램프) 검토 중

3		현안사항 및 검토의견

□ 현안사항

○ 구리시 행정구역내 추진되는 군·경 합동검문소 등 일부 공정은 상반된 이견으로 협의 지연 등 현 단계 추진 어려움.

※ (협의 지연) 군·경합동검문소, 중로3-26호선 도로개설, 대체녹지 조성(사노동)

□ 검토의견

구 분	관계기관 의견	추진사항	검토의견
군·경 합동검문소 (구리시) (3층, 816㎡)	- (구리시) 교통광장내 군·경 합동검문소 설치 허가 불가 ※ 도로법에 의한 도로구역 결정후 도로 관리시설 설치시 협조 ‣ 서울시 : 도로구역 결정 및 점용허가 ‣ 구리시 : 건축허가(개발제한구역) - (수방사)검문소 설치 완료시 까지 공사준공 불가 입장	- ’15.10. : 도로구역 범위 협의 중(구리시,도로계획과) ‣ 서 울 시 : 특별시도 주도로노선 기준 ‣ 구 리 시 : 아천IC 교통광장 및 용마 터널 포함 구리시 구간 전체	- 구리시와 지속적으로 협의설득 하되, 불가시 도로관리주체 협의 결과에 따라 도로구역 범위 결정 추진 ※ (도로계획과) 국토부 재정 신청 중
중로3-26호선도로개설 (구리시) (B=12m,L=200m)	- (구리시)WEP 사업당시 보상 완료된 토지로 조속 공사 시행 요구 (서울시) 민원제기 등 토지소유권 및 보상문제 선해결시까지 추진 불가 ※ (강동구) 보상내역 불명확, 이중 보상문제로 추진 불가	- ∼’15.10. : 공사시행 방안 협의(구리시,구리∼포천) ‣ (서울시) 도로정비 (덧씌우기) 및 구리 ∼포천 민자고속사업 통합 시행방안 ‣ (구리∼포천) 공사시행 불가 입장 ‣ (구리시) 도시계획인가 고시 내용에 의해 서울시에서 추진 요구	- 지속적 협의를 추진 하되, 전체 사업내용 등을 고려하여 공사 타절 등 추진방안 마련

구 분	관계기관 의견	추진사항	검토의견
대체녹지 (구리시) (A=89,206㎡) ※ 계약 미반영	-(구리시) 국토부 GB 승인 사항으로 조속 추진 -(서울시) 대체녹지 조성지로 부적합하니 대상지 변경 요청 ※ 오랜 기간경과로 현재 생태환경 등급도가 상향(1∼2등급)된 지역으로 에산 낭비 우려 (환경부 국가환경성평가지도)	- ∼’15.10. : 현장조사 및 대상지 변경 요청 ‣ (서울시) 대상 후보지 변경 조사 요청 ‣ (구리시) 서울시에서 추진할 사항으로 대상지 조사 협조 불가	- 국토부와 별도 협의후 추진방안 검토

3		설계변경 현황

□ 설계변경 주요내용

○ 현장 여건변동에 따른 실정보고 승인 내용을 반영한 계약금액 조정

- 암사IC 제내지 도로노선 조정(부체도로→도시계획도로)등 29건, 53억원

○ 군·경합동검문소 등 관계기관(구리시)협의 지연 및 추가 공사 발생에 따른 계약기간 연장

- (추가공사) 아천IC 교통안전시설(CCTV 등)(3개월), 제설작업(4개월)

- (협의지연) 군·경 합동검문소, 중로3-26호선, 대체녹지(사노동 일대)

□ 계약 금액 및 기간 변경

○ 계약금액 변경(도급액 기준)

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
총차	12회	192,599,000	197,939,000	증) 5,340,000
15차	3회	18,517,000	21,739,000	증) 3,222,000
16차	내역분리발주	-	2,118,000	증) 2,118,000	검문소 및 중로3-26호선

○ 계약기간 변경

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
총차	12회	2006.03.23.∼ 2015.10.30.	2006.03.23.∼ 2016.04.30.	증)6개월
15차	3회	2014.12.11.∼ 2015.10.30.	2006.03.23.∼ 2015.10.30.	변경없음
16차	내역분리발주	2015.10월(예정)	2015.10.30.∼ 2016.04.30.	6개월	검문소 및 중로3-26호선

□ 감리단 검토의견

○ 현장 여건변동에 따른 실정보고 사항을 반영한 설계변경으로 계약금액 변경 시행이 타당하며

○ 관계기관 협의 등 허가 지연으로 15차 공사에 반영된 군·경 합동검문소 및 도로개설(중로3-26호선 : Ramp-N)공사 등에 대하여는 계약내역을 분리하여 별도 차수(16차)로 발주 추진 필요.

4		조치계획

□ 상기 감리단에서 제출한 현장 여건변동 및 관련규정 개정으로 현장실정보고 승인된 ‘암사IC 제내지 도로노선 조정(부체도로→도시계획도로)등 29건에 대한 설계변경 요구사항에 대해 계약금액을 변경코자 하며

□ 군·경 합동검문소 등 관계기관 협의 지연으로 착수시기가 불투명한 공종에 대하여는 계약내역 분리 별도 차수(16차)로 발주하여 공사기간 연장 등 전체 사업 준공에 차질이 없도록 조치코자 함.

붙 임 : 1) 설계변경 세부내용 1 부.

2) 감리단 공문 및 검토의견서 각 1 부.

3) 변경설계서(총차 12회, 15차 3회) 및 설계서(16차) 각 1 부.  끝.