투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	계약변경(제3처리장 종침 사이폰식 슬러지수집기 개량공사-준공기한 변경) 의뢰

1. 관리과-11655(2015.08.26.)호와 관련입니다.

2. 우리 센터에서 시행중인『제3처리장 종침 사이폰식 슬러지수집기 개량                 공사』사업의 계약내용중 준공기한 변경요청 하오니 처리하여 주시기                 바랍니다.

가. 건    명 : 제3처리장 종침 사이폰식 슬러지수집기 개량공사

나. 계약금액 : 금76,485,000(금칠천육백사십팔만오천원)

다. 계 약 자 : ㈜이엔이텍(대표 : 이붕용)

라. 변경내역(준공기한 변경)

구분	변 경 전	변 경 후	비 고
준공기한	2015.10.22	2015.12.28.

마. 변경사유

- 종침 오니수집기 조작반 정비사업(전기분야)연계한 시운전 필요

- 종침 오니수집기 조작반 정비사업 납품기한 : 2015.12.31.

바. 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리,       중랑물재생센터 수처리 유지보수, 시설비.

붙임 : 합의각서 1부. 끝.

	물재생과장
주무관	진관용		물재생과장	10/15 강병수
협조자
시행	물재생과-6781	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02)2211-2563	/전송	02)2211-2579	/	imsangli@seoul.go.kr	/	부분공개