문서번호	시설과-7432
결재일자	2015.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
송창선		김한준	10/15 이용태
협조
	조경팀장		남상국

중랑캠핑숲내 청소년 체험의숲 조성사업

준공기한 연기(2차) 검토보고

2015. 10

중부공원녹지사업소

(시설과)

중랑캠핑숲내 청소년 체험의숲 조성사업

준공기한 연기(2차) 검토보고

“중랑캠핌숲내 청소년 체험의숲 조성사업”의 공사감독을 수행하고 있는 시설관리공단으로부터 준공기한 연기(2차) 요청이 접수되어 검토보고 함

공사개요

❍ 공 사 명 : 중랑캠핑숲내 청소년 체험의숲 조성사업

❍ 공사기간 : ‘15. 4. 20 ~ 10. 16

❍ 도 급 액 : 749,384천원

❍ 도 급 자 : 아이서비스(주) (대표: 김세민)

검토사항

❍ 준공기한 연기요청[(시설관리공단 공사감독3처-9991(‘15.10.15))

- 상징안내판 시안변경(안내판 다국어표기 검정기간 소요)

- 시공사 시운전 기간 소요

❍ 준공기한 연기(14일)

- 당초 : 2015. 04. 20 ~ 2015. 10. 16

- 변경 : 2015. 04. 20 ~ 2015. 10. 30

❍ 연기에 따른 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

검토결과

❍ 공사시행 및 시설점검(운영)에 필요한 공기연장 건으로, 상기와 같이 공사기간을 연기하여 공사시행에 철저를 기하고자 함

붙임 : 준공기한 연기요청 공문 1부.  끝.