투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	한강공원 나들목 증설공사(신청담) 전면책임감리용역 설계변경(전체4회) 계약 의뢰

우리본부에서 시행중인 「한강공원 나들목 증설공사(신청담) 전면책임감리용역(장기계속)」관련 설계변경(전체4회)에 대하여 계약의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 한강공원 나들목 증설공사(신청담) 전면책임감리용역(장기계속)

나. 용역개요 : 보행자전용 나들목 신설(육갑문 및 E/V 2개소) 책임감리

- 신청담 나들목 : 폭 5.0m,  높이 3.5m, 연장 83.5m

다. 용역기간 : 전체 ‘13.04.26 ~‘16.05.01

라. 감 리 사 : ㈜동일기술공사, ㈜수성엔지니어링

마. 설계변경사유 : 한강나들목 개선공사(개화) 추가과업 반영

치수과-3507(2015.10.07.)호 건설사업관리용역 통합운영 계획

바. 설계변경 내역

(단위:원)

전 체(4회)			비 고
당 초	변 경	증 · 감
905,800,000	1,273,100,000	증) 367,300,000

사. 예산과목 :

한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강의 자연성회복 및 시민편의 개선,

한강접근체계개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 감리비(100-401-02)

붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 사유서(전체4회) 1부.

3. 설계변경 내역서(전체4회) 1부.

4. 한강공원 나들목 증설 및 개선(신청담,개화) 건설사업관리용역 통합운영계획 1부.  끝.

	치수과장
★주무관	방호익		치수과장	10/15 신용철
협조자	주무관	박정태
시행	치수과-3604	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0683	/전송	3780-0744	/		/	대시민공개