보고서(급수공사연기)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
권영안	代권영안	10/15 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-27267

광진구 상수도공사 감독업무 수행(화양동45-17호급수공사) 중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2015. 10.15.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 권 영 안

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 광진구 상수도공사(장기계속공사)

연번	주 소	수요가명	공사기간	지시번호	비 고
1	화양동45-17	한정상	15.10.6~10.15	신설-262

□ 연기요청사항

연번	주 소	수요가명	연기요청 사유	공사연기 기간	요청인
1	화양동45-17	한정상	비계철거지연	15.10.30	한정상

□ 검토결과

○ 신축현장 타공정 지연에 따른 수요가측 공사연기로 인하여 공사기간 내 공사가 어려워 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주 소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	화양동45-17	한정상	15.10.6~10.15	15.10.30

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.