투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2013년 도로굴착복구공사 검측감리용역 설계변경(최종) 시행

1. 도로보수과-236(2014.1.9)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리사업소에서 사업추진중인 『2013년 도로굴착복구공사검측감리용역(강북권역)』설계변경(최종)을 시행 하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2013년 특별시도(차도) 굴착복구공사 감리용역(강북권역)-서부

나. 용역기간 : 2013. 4. 15 ~ 2014. 1. 14

다. 계약금액 : 금삼억이천구백이십오만원정(\329,250,000원정)

라. 계약업체 : ㈜건화  대표 최진상 + ㈜동해종합기술공사  대표 정점래

마. 설계변경금액

【단위: 원】

구 분	설계변경 내역			비고
	당 초	변 경	증 ㆍ 감
총 용역비	329,250,000	328,755,000	감) 495,000

바. 설계변경사유 : 직접경비(전기사용료) 감액 정산

사. 예 산 과 목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구(도로굴착복구기금), 도로굴착복구공사, 시설비 및 부대비, 감리비

붙임문서 1) 설계변경 내역서(최종) 1부.

2) 설계변경(정산) 검토보고서 1부.  끝.

주무관	정재훈		주무관	이경남		도로보수과장	01/09 이규철
협조자	주무관	신기호		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-277	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8359	/전송	300-8364	/		/	대시민공개