문서번호	도시철도사업부-9170
결재일자	2015.10.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		경전철1과장	도시철도사업부장
정영호		박동룡	10/16 권영찬
협조
	주무관		위성환

- 우이~신설 도시철도 민간투자사업(4공구) -

2015년 10월 3주 휴일 감리 근무계획 승인 검토 보고

2015. 10.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

2015년 10월 3주 휴일 감리 근무계획 승인 검토 보고

우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업(4공구)의 감리단 휴일 근무계획 승인 신청에 대한 검토 보고임

Ⅰ				휴일 근무 요청내용

관련근거 : 도화(우이경감) 제2015-744호(2015. 10. 14)

휴일 근무일자

- 휴일 근무일자 : 2015. 10. 17(토)

Ⅱ				휴일 근무 계획

관련근거

- 입찰안내서 제6장 6.2.3 휴일 및 야간작업 근무요령

- 책임감리 현장참여자 업무지침서 제5조제3항(감리원의 근무수칙)

근무사유

- 원활한 공정추진을 위한 연속적인 작업시행을 통해 정거장 및 환기구 구조물 공정을 만회하여 시민불편해소에 만전을 기하고자 함.

책임감리의 휴일 작업 승인조건

- 휴일 작업 시행 2일전 작업세부계획 수립하고 공사관리의 공백이 발생하지 않도록 근무자 정위치 배치하시기 바랍니다.

- 지하매설물 관련 규정을 숙지하여 이행하고, 안전수칙을 지켜 안전사고가 발생하지 않도록 공사장 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

- 위험한 작업의 내포 또는 지장물 등의 근접작업으로 유관기관의 입회가 필요할 경우 평일 주간에 시행하시기 바랍니다.

- 휴일 작업시 감리원은 1~2인 탄력적으로 근무하되, 감리비는 시공사 부담입니다.(입찰안내서 제6장 6.2 규정에 따라 원인자 부담)

휴일근무 주요내용

근무일자	근무형태	시공사 휴일작업 주요내용		비 고
10. 17(토)	주 간 (감리원 1인)	L10E환기구 (아리랑쉼터)	수직구 6단 철근조립 및 거푸집 설치	***
		L11정거장 (성신여대입구역)	환승통로 집수정 철근조립
		L11E환기구 (경동고사거리)	가시설 1단 버팀보 해체 및 인양
		L12정거장 (보문역)	환승연결통로 철근 조립
		L12E환기구 (동대문세무서)	지장물(통신관) 복구
		L13정거장 (신설동역)	환기덕트 주변 토공정리

Ⅲ				조 치 계 획

감리단의 휴일 작업에 대해 책임감리원의 검토의견과 같이 작업의 연속성과 공정만회를 위해 공정계획에 지장이 없도록 휴일근무계획에 대하여 승인하고자 함.

붙  임 : 휴일 작업 감리근무계획 승인 요청 공문 1부.  끝.