투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	내부결재
(경유)
제 목	'백인제가 주생활전시관 전시연출용역 계약 변경 검토(2차)

1. 전시과-3545(2015.10.16.)호와 관련입니다.

2.「백인제가 주생활전시관 전시연출용역」변경계약요청건에 대하여 검토한바, 지방계약법 제22조 및 동법 시행령 제74조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장제6절(공사설계변경)에 해당되어 변경계약체결 하고자 합니다.

가. 건  명 : 백인제가 주생활전시관 전시연출용역

나. 변경요청사항

구분	변경전	변경후	변경내용
계약기간	․ 15.09.09∼10.16	․ 15.09.09∼10.16	변동없음
과업내용	․전체 벽체 도배 ․전시소품 151	․부속실 일부 도배 축소 ․전시소품 142	변경내역서 참조
계약금액	․510,274,500원	․499,440,600원	15,833,900 감액

다. 검토결과

- 백인제가옥 내 기존도배면 활용으로 도배공사 물량 축소 및 전시 기획변경으로 소품류 수량조정으로 계약변경이 필요하다고 사료됨. 끝.

주무관	임정민		총무과장	연규승		경영지원부장	10/16 박형중
협조자	주무관	김양균
시행	총무과-12621	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55	/	http://www.museum.seoul.kr
전화	724-0117	/전송		/		/	부분공개(7)