투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기요청(중랑캠핑숲내 청소년 체험의숲 조성사업)

1. 시설과–7432(2015.10.15)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 발주하고 서울시시설관리공단에서 공사감독 수행중인 “중랑캠핑숲내 청소년 체험의숲 조성공사”에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기(2차)하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑캠핑숲내 청소년 체험의숲 조성공사

나. 도 급 액 : 749,384,000원

다. 공사기간 : 2015.4.20 ~ 10.16

라. 도 급 자 : 아이서비스(주) 김세민

마. 금액변경 : 없음

바. 준공기한 연기

- 당초 : 2015.4.20 ~ 10.16

- 변경 : 2015.4.20 ~ 10.30(14일 연장)

붙임  1. 검토 보고서 1부

2. 준공기한연기의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	송창선		조경팀장	남상국		시설과장	전결 10/16 김한준
협조자
시행	시설과-7441	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5967	/전송	02-3783-5969	/	pinus74@seoul.go.kr	/	대시민공개