설계변경 사전심의서

부분공개(6)

1. 공사명 : 고덕초등학교외 6개소 학교급수시설개선공사[배관]

신청부서명	시설관리과
작 성 자	윤 기 영
제 출 일	2015. 10. 19.

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2015. 10. 19(월)

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이	의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위    원

시설관리과장

남정렬

10/19

代송종범

타당함

위    원

주무관

임인택

임인택

타당함

위    원

주무관

한호진

한호진

타당함

위    원

주무관

송종범

송종범

타당함

위    원

주무관

김효수

김효수

타당함

담    당

주무관

윤기영

윤기영

설계 변경 사전심의 설명서

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 고덕초등학교외 6개소 학교급수시설개선공사[배관]

○ 공사기간 : 2015.07.02 ~ 2015.10.21

○ 도 급 자 : 광진공영(주) 대표 이덕희

○ 도 급 비(당초) : 51,917,710원

○ 도 급 비(변경) : 34,161,000원

○ 시행부서 : 강동수도사업소 시설관리과

○ 설계변경 검토부서 : 강동수도사업소 시설관리과

□ 설계변경 내용

○ 공사내역 변경

구 분	부설 연장(m)		증․감 (m)		비 고
	당 초	변 경
15~30㎜	917	1,001	증	84
음수대	44	49	증	5	본부 일괄 구매

○ 공사금액 변경

구 분	금 액 (원)		증 ․ 감 (원)	비 고
	당 초	변 경
총 공 사 비	51,917,710	34,161,000	감) 17,756,710
도 급 비	51,917,710	34,161,000	감) 17,756,710

□ 설계변경 사유

○ 계약물량 변경 및 신규공종

- 계약물량 감소 사항 발생 : PVC배수배관공 D30㎜ 외 10개 공종

- 계약물량 증가 사항 발생 : 스텐레스배관공 D13㎜ 외 13개 공종

□ 설계변경 심의내용

○ 설계변경 사항 타당 여부

○ 변경물량 및 신규단가 산출, 적용 등의 적정 여부

붙  임 : 설계변경내역서 1부.  끝.