문서번호	공간정보담당관-11345
결재일자	2015.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보개발팀장	공간정보담당관
최지혜		김태준	10/19 조봉연
협조

2015년 항공사진 서비스 기능개선 사업 주간업무(10월3주) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
공간정보 담당관-4594				142,560천원

2015. 10.

정 보 기 획 관

(공간정보담당관)

2015년 항공사진 서비스 기능개선 사업

주간업무(10월3주) 보고

사업명			2015년 항공사진 서비스 기능개선 사업
사업기간			`15.08.04. ~ `16.01.31.	서울시담당		공간정보담당관 최지혜
사업비			142,560천원	업체/PM		㈜씨엠월드 컨소시엄 박철희 차장
보고기간			‘15.10.12.~‘15.10.16.	전체공정율		계획 25.5% / 실시 23.9%
주요내용			1. 기능상세 설계 2. 2015년 항공사진 공간해상도 정보 삭제처리 3. 인트라넷 항공사진 TileMap 2013년도 구축 제작
주간 업무 보고
Part	금 주 실 적 (2015.10.12 ~ 2015.10.16)				차 주 계 획 (2015.10.19 ~ 2015.10.23)
사업관리					화면 디자인 설계 및 기능 목록 협의
시스템 개발	1. 시스템 설계 - 항공사진 시민서비스 신청서, 검색 디자인 개선 방안 설계 - DB 개념 설계				1. 시스템 설계 - 항공사진 시민서비스 신청서, 검색 디자인 개선 방안 설계 - DB 개념 설계
DB구축	1. 인트라넷 서비스 벡터 데이터 좌표변환 - 투영원점 변경에 따른 좌표변환 시계열 주점 외 8개 항목(총:16개 항목) 2. 2015년 항공사진 자료 분석 - 항공사진 공간해상도 정보(GSD:10cm)삭제 - 진북 및 국군기무사 보안지역 확인 - 항공사진 원본 오류 및 진북 오류 (원본오류 : 1매-24코스 30번, 진북오류 : 4매-79코스 37, 38, 39, 40번) 3. 인트라넷 서비스 TileMap 구축 제작 - 2013년도 정사영상지도 제작(TileMap)				1. 인트라넷 서비스 TileMap 구축 제작 - 2009년도 정사영상지도 제작(TileMap) 2. 항공사진 시민서비스 메터 데이터 좌표변환 - 투영원점 변경 정보 Update 3. 2015년 항공사진 DB구축 - 항공사진 공간해상도 정보 삭제 내용 검토 - 항공사진 진북 회전 작업 - 추가 변경 원본항공사진 입수(예정) - 성과내역 작성
산출물/ 별첨자료	○ 주간보고서 1부.
협조사항
對 서울시
對 용역업체
기타