“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰((가칭)봉제박물관 건립부지 건축폐기물 처리용역)

1. 문화융합경제과-11359(2015.10.19)호와 관련입니다.

2. 2015. 9. 7일자로 계약되어 추진 중인 「가칭)봉제박물관 건립 부지내 건축물철거 공사 건설폐기물 처리용역」에 대하여 아래와 같이 폐기물 물량증가에 따른 변경계약을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 창신동 (가칭)봉제박물관 건립 부지내 건축물철거 공사 건설폐기물 처리용역

2) 계 약 자 : 만강건설(주), ㈜수도권환경

3) 용역금액 : 금19,404,000원(금일천구백사십사천원)

나. 변경내역 : 용역비 증액(19,404천원→25,641천원, 6,237천원 증)

다. 변경사유 : 봉제박물관 부지내 건축물 철거관련 실 시공 물량 증가

라. 예산과목 : 문화산업 육성지원, 패션산업 육성, 창신동 봉제박물관 및 봉제

거리 조성, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

붙임 : 1. 설계변경 검토보고 1부

2. 변경내역서 1부

3. 합의각서 1부

4. 공동수급표준협정서(수정본) 1부.  끝.

	문화융합경제과장
주무관	김성미		문화산업정책팀장	박원근		문화융합경제과장	10/19 곽종빈
협조자
시행	문화융합경제과-11366	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울 3층	/
전화	02)2133-8490	/전송	02)2133-0742	/		/	부분공개