문서번호	도로보수과-4539
결재일자	2015.10.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
이기영		국중진	10/19 이종엽
협조
	★주무관		하승환

군자교 외 4개소

교통사고 잦은곳 개선공사 추진계획

2015. 10. 19

성동도로사업소

(도로보수과)

군자교 외 4개소

교통사고 잦은곳 개선공사 추진계획

교통운영과-17246(2015.9.5) 및 교통운영과-18087호(2015. 9. 16)

‘10년 중대한 교통사고 지점 개선 및 2015년 교통사고 잦은곳 개선사업

예산 재배정과 관련임.

▢ 예산 재배정 현황 : 146,134,000원

○ 군자교 주변 : 금85,480천원

○ 망우사거리  : 금21,230천원

○ 중곡주유소  : 금8,600천원

○ 청계8가     : 금11,600천원

○ 군자역 외 1 : 금19,224천원

▢ 공사개요

연번	사업위치	사 업 내 용	규 모
1	군자교 주변	노면표시 제거 및 도색	제거 12m, 도색 1,406m
		미끄럼방지포장(그루빙)	1,860㎡
2	망우사거리	노면표시 제거 및 도색	제거 427m, 도색 780m
		무단횡단금지시설 설치	108m
3	중곡주유소	노면표시 제거 및 도색	제거 342m, 도색 1,383m
		무단횡단금지시설 설치	26m
4	청계8가	노면표시 제거 및 도색	제거 304m, 도색 1,475m
5	군자역 외1	노면표시 제거 및 도색	제거 178㎡, 도색 1,258m

▢ 추 진 계 획

○ 군자교 주변

- 1차로~4차로 구간이 노후되어 그루빙작업 전 포장필요

․ 포장은「2015 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)」에서 재포장공사를 추진

․ 자재는 「2015 노후포장도로 정비공사(1구역)」의 개질 아스콘 사용.

․ 부족 예산은 노후포장도로 정비공사 예산 사용

․ 그루빙은 일반적으로 사용되는 9*51*4mm 규격으로 관급구매․설치

- 노면표시는「2015 노면표시 유지보수공사(연간단가)」에 작업지시

○ 군자교 주변, 망우사거리, 중곡주유소,청계8가, 군자역 외 노면표시 도색

- 노면표시는「2015 노면표시 유지보수공사(연간단가)」에 작업지시

○ 망우사거리, 중곡주유소 무단횡단금지시설 설치

- 무단횡단금지시설 관급자재 구매․설치

․ 기존에 설치된 무단횡단 금지시설과 유사한 디자인으로 가격을 고려하여 관급구매 설치

▢ 추진일정

공종	추진일정			비 고
	10월	11월	12월
군자교 포장공사 및 그루빙
노면표시 (군자교 주변 외 5개소)
무단횡단금지시설 (망우사거리, 중곡주유소)

▢ 조치계획

○ 위와 같이 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가) 및 노면표시 유지보수공사(연간단가) 작업지시 및 관급구매․설치 요청하여 교통사고 잦은곳 개선사업을 추진하고자 하며 작업완료 후 설계변경 반영, 정산처리하고자 함.

○ 개략공사비

구 분	물 량	규격	공사비(천원)	비고
포장공사비	12a	개질,5cm	36,000
그루빙	1,860㎡	9*51*4mm	33,103
노면표시	2,272m	제 거	53.311
	6,302m	재도색
무단횡단금지시설	54경간	80*2500*1150	8,958
계			131,372

끝.