문서번호	시설관리과-22120
결재일자	2015.10.19.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
정진호		문용욱	10/19 이자원
협 조

공사근로자 노무비 지급 적정성 검토 보고

(2015년 상수도관 전식방지공사)

2015.10.19.

강서수도사업소

(시설관리과)

공사근로자 노무비 지급 적정성 검토보고

2015년 발주한 모든 공사에 대한 시장방침(노무비지급 확인제)에 의거, 계약업체에서 제출한 공사근로자 노무비 청구의 적정성 검토임.

□ 관련근거

가. 하도급 대금지급 확인시스템(시장방침 제93호, 2012.4.1)

나. 계약예규 9. 공사계약 일반조건

1) 제43조의2(하도급대금 등 지급확인)

2) 제43조의3(노무비의 구분관리 및 지급확인)

다. 공사 근로자 노무비 청구서 접수안내(행정지원과-20423호, 2015.10.6)

□ 공사현황

가. 공 사 명 : 2015년 상수도관 전식방지공사

나. 공사개요 : 정류기	2개소, Test Box 4개소 설치, 양극공(D200㎜) 보링                   및 양극 매설 10개소, 전기 인입 및 배선공사 1식

다. 계 약 일 : 2015. 07. 09.(착공일 : 2015. 07. 13.)

라. 준공기한 : 2015. 11. 09.

마. 수 급 자 : (주)공항엔지니어링  대표 구 본 영

바. 공사금액 : 금232,340,140원

□ 보고내용

가. 노무비 청구 현황

1) 노무비 청구일 : 2015년 10월 13일

2) 노무비 청구월 : 2015년 9월분

3) 노무비 총  액 : 금77,477,200원(직접노무비+부가세)

4) 노무비 청구금액 : 금8,052,000원

5) 노무비 구분확인 내역

구 분	노무비총액	전월까지 청구금액	금월 청구금액	총 청구금액	잔여금액
노무비 구분확인 청구액	77,477,200	-	8,052,000	8,052,000	69,425,200

나. 공사진행 현황

- 현재 공정율 : 30%(’15년 9월 30일 기준)

※ 공정률 계산 = 작업완료분 / 총 작업대상

다. 검 토 의 견

검토항목	검토기준	검토내용		검토결과
노무비 청구금액 적정성	노무비 청구요청 금액과 실근로자 지급금액 일치 여부 확인	노무비 청구요청금액	8,052,000원	적 정
		실근로자 지급금액	8,052,000원
		누계(노무비 지급금액)	8,052,000원
		노무비 청구율 (노무비 총액 기준)	10.4%
		관련자료	노무비 대금청구서
	실공정률 보다 노무비 청구율이 적은지 확인	노무비 총액	77,477,200원	적 정
		노무비 청구가능금액 (실공정률 기준)	23,243,100원
		실공정률	30.0%

□ 행정사항

가. 공사근로자 노무비청구 적정성에 대해 검토한 바, 적정하다고 판단되어 대금  지급을 승인코자 함.

나. 승인된 공사근로자 대금(노무비) 지급 여부 확인 시행(지급일로부터 5일이내)

붙임 : 공사근로자 노무비 청구서 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원 ☎3146-3990 기전팀장 : 문용욱 ☎3146-3994 담당 :정진호☎3146-4016