문서번호	정수시설과-4773
결재일자	2015.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정수시설과장		광암아리수정수센터소장
곽대근	이정원	김창현		10/20 차윤기
협 조	정수운영과장		손호철
	★주무관		강석규

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

정수지(9지) 유출밸브 교체공사 시행계획

2015. 10

광암아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	정수지 상부 안전검토
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□	지침서

정수지(9지) 유출밸브 교체공사 시행계획

우리 정수센터 정수지(9지) 유출밸브가 장기간 사용으로 노후 및 부식이   심해 지수에 어려움있고 설비 노후로 인한 수질저하 등이 발생하여 밸브를 다음과 같이 교체하여 아리수 생산 및 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		정수지 밸브설비 현황

□ 정수지 밸브설치 현황

구 분	규 격	형 식	용 도	수 량 (교체예정)	설치년도	비고
계				44대
정수지(5~8지)	D1,200	전동	정수지 유입	8대	2010	‘13이전 교체완료
			정수지 유출	8대	2013
정수지(1~4지)	D1,000	전동	정수지 유입	8대	2015	‘15 교체완료
			정수지 유출	8대	2015
정수지(9~10지)	D1,000	수동	정수지 유입	4대	1985	2대 교체 (나머지 ‘16 교체 예정)
			정수지 유출	4대 (2대)	1985
정수지(11지)	D1,200	전동	정수지 유입	2대	1985	‘16 교체예정
			정수지 유출	2대	1985

□ 정수지 배관 및 밸브 배치도

정수지 5~8지 정수지9~11지 9지 유출 밸브
범례	기 교체 완료	○	교체 예정	○	‘16년이후 교체추진	○

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 광암아리수정수센터 정수지(9지) 유출밸브 교체공사

□ 공사기간 : 2015. 10월 ~ 11월

□ 공사내용 : 정수지(9지) 유출밸브(D1,000mm) 버터플라이밸브 2대 교체

□ 소요예산 : 17백만원(관급자재 7백만원, 기계공사 10백만원)

□ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,기타교체비

Ⅲ		세부추진계획

□ 공사전 조치사항

①

◯ 현재 정수지 9지는 운영중지상태로 유출밸브 교체 전 중간밸브➀를 폐쇄하고 교체작업 실시

①

①

◯ 서울시양궁팀과 협의하여 공사 중 양궁 중단토록 일정 협의

□ 밸브교체공사 세부추진사항

◯ 버터플라이밸브(D1,000A×2대) 구매(본부 구매)

▷ 상수도사업본부 구매시행 완료(11월 중 입고예정)

◯ 신축관이음(D1,000A×2대) 조달구매(자체 구매)

◯ 밸브교체공사

▷ 본부배정된 예산은 2천만원으로 올해 정수지 9지 유출밸브 2대만 교체

□ 정수지 밸브교체공사 세부추진 일정

◯ 2015. 10. 19 : 관급자재(신축관이음) 조달구매(1개월 소요)

◯ 2015. 10. 21 : 밸브교체공사 시행

◯ 2015. 11. 30 : 공사 완료

Ⅳ		계약방법

□ 계약방법

◯ 관급자재 : 제3자단가계약(조달청)

◯ 기계공사 : 소액 수의계약

Ⅴ		기대효과

◯ 안전하고 맛있는 아리수 안정적 생산 및 공급

◯ 맑고 깨끗한 정수수질 유지

◯ 효율적인 시설물 관리로 유효율 향상

◯ 노후시설 교체로 원활한 아리수 생산관리

Ⅵ		행정사항

◯ 신축이음관 2대 조달구매

◯ 밸브교체공사 시행

붙임 : 1. 설계내역서 1부

2. 관급자재 구매 요청서 1부. 끝.