문서번호	조경과-14819
결재일자	2015.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	녹화지원팀장	조경과장
홍순철	代홍순철	전결 10/20 이원영

서울 정원박람회 정원작품 안내판 조달구매 계약기간 연장

2015. 10.

푸른도시국

(조경과)

서울 정원박람회 정원작품 안내판 조달구매 계약기간 연장

서울 정원박람회 기간중 조성된 15개 정원 작품에 대한 안내판이 일반시민들이 이해하기 어렵게 설치되었기에 안내판 문안 재작성 등에 필요한 계약기간을 연장하여 시행하고자 함
	ㅊ

		계약개요

○ 계약건명 : 서울정원 박람회 정원 작품 안내판 조달 구매

○ 계약업체 : ㈜도시와숲 대표 라정란

○ 계약금액 : 20,724,000원

○ 계약기간 : 2015. 9. 23 ~ 11. 2

		계약 변경 계획

○ 계약기간 연장사유

- 서울정원 박람회 기간중 조성된 15개 정원 작품에 대한 안내판이 일반시민들이 이해하기 어렵게 작성 및 설치되었기에 안내판 문안 재작성 등에 필요한 소요기간 연장 필요

○ 계약기한 연기

- 당 초 : 2015. 9. 23 ~ 2015. 11. 2

- 변 경 : 2015. 9. 23. ~ 2015. 11. 30

○ 향후일정

- 2015.11.30. : 안내판 설치 완료

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부

2. 합의각서 1부. 끝.