문서번호	토목부-21931
결재일자	2015.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
정문수		이승우	전결 10/20 노우성
협조
	주무관		이석근

준 공 기 한 연 기  보 고

( 성산대교 성능개선사업 건설사업관리(설계감리)용역 )

2015. 10.

서울특별시도시기반시설본부

( 토  목  부 )

준 공 기 한 연 기  보 고

( 성산대교 성능개선사업 건설사업관리(설계감리)용역 )

현재 시행 중인 “성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계용역” 설계감리용역의 준공기한을 연장하고자 보고하는 내용임.

※ 준공기한 연기 현황 : 2015.10.21. → 2015.12.31.(증71일)

▢ 용역 현황

◦ 용 역 명 : 성산대교 성능개선사업 건설사업관리(설계감리)용역

◦ 위    치 : 마포구 망원동 ~ 영등포구 양화동 (성산대교)

◦ 규    모

- 구조안전성 검토 : 기존 손상규모 및 성능개선을 감안한 구조안전성 검토

- 성능개선 기본 및 실시설계

▻ 슬래브 전면교체 48,000㎡(=480a)

(본교 및 접속교 : B=27.0~39.2m, L=1,455m)

▻ 구조물 보강 (거더, 트러스, 브레이싱 등)

- 유지관리계획 수립

◦ 계약기간 : 2014.12.22. ~ 2015.10.21.

◦ 계약금액 : 214,957,000원

◦ 계 약 자 : ㈜유신  박찬식

▢ 근    거 : 유신 구조-15-4407(2015.10.20.)로 과업기간 연기 요청

▢ 준공기한 연기사유

◦ 기본 및 실시설계의 과업기간 연장에 따른 설계감리기간 연장

- 공법심의 위원회를 통한 공법(가교, 도장) 선정으로 설계기간 부족

※ 설계 용역기간 : ′13.11. 1. ~ ′15.12.31.

◦ 설계자문회의 및 건설기술심의 등 행정절차 이행에 따른 설계기간 부족

- 서울디자인심의, 설계자문회의, 설계VE 및 건설기술심의 등 수행

▢ 설계변경 내역

◦ 용역비 및 준공기한 내역

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비고
용 역 비	214,957,000	214,957,000	변경없음
준공기한	′14.12.22.~′15.10.21.	′14.12.22.~′15.12.31.	증)71일

- 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치의견

◦ ㈜유신으로부터 제출된 준공기한 연기 요청을 검토한 바 보다 양질의 설계 성과품이 납품될 수 있도록 “성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계” 설계감리용역의 준공기한을 연기하여 설계감리용역 업무에 만전을 기하도록 조치하고자 합니다.

붙  임 : 1. 설계용역 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 연기요청 공문 1부.

3. 예정 공정표(변경) 1부.  끝.