투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기요청(옛 시장공관 리모델링 공사)

1. 우리 본부에서 시행 중인 『옛 시장공관 리모델링 공사』와 관련 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 옛 시장공관 리모델링 공사_냉난방기 구매

나. 관급자재 내역 및 납품기한 연기

품 명	납품요구번호	계약자	계약금액	납품기한
				변경전	변경후
냉난방 공조공사	121522516500	엘지전자㈜	56,482,750	‘15.11.04	‘16.04.30
냉난방기 (직립형)	121522516600	엘지전자㈜	1,470,000	‘15.11.04	‘16.04.30

다. 연기사유 : 선행 공종 지연

라. 지체상금 : 미부과

따로붙임 : 1. 냉난방기 납품기한 연장 요청 공문 1부.

2. 공사 예정공정표  1부. 끝.

	설비부장
주무관	김경남		건축설비과장	김영수		설비부장	10/20 박기형
협조자
시행	설비부-12992	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8627	/전송	02-3708-8659	/	knkim8@seoul.go.kr	/	대시민공개