투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	운영1과장
(경유)
제 목	『잠실 실내체육관 우수관 등 정비공사』 제2차 설계변경 시행

1. 시설관리과-365호(‘14.01.09))와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『잠실 실내체육관 우수관 등 정비공사』에 대하여 아래와 같이 제2차 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 잠실 실내체육관 우수관 등 정비공사

나. 공사기간 : 2013. 12. 03 ~ 2014. 02. 15

다. 도급금액 : 금355,350,000원

라. 시 공 자 : ㈜한기엔지니어링 대표 송 유 석

마. 변경금액

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액 (제1차 설계변경)	변 경 금 액 (제2차 설계변경)	증 감	비 고
공 사 비	공급가액	323,045,454	322,927,273	감 118,181
	부가가치세	32,304,546	32,292,727	감 11,819
	도 급 액	355,350,000	355,220,000	감 130,000
	이전비	7,952,530	7,952,530	-
	총 공사비	363,302,530	363,172,530	감 130,000

바. 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업, 종합운동장시설개보수, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1) 방침서 1부.

2) 제 2차 설계변경내역서 1부. 끝.

	시 설 관 리 과 장
★주무관	이강호		주무관	이정원		시설관리과장	01/09 신동호
협조자	주무관	우인식
시행	시설관리과-380	(		)	접수		(		)
우	138-220	서울 송파구 올림픽로 25(잠실동 10)	/	http://stadium.seoul.go.kr/
전화		/전송	0222408777	/		/	대시민공개