문서번호	시설관리과-22880
결재일자	2015.10.20.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
윤복철	10/20 송근호
협 조

시설물공사 연기보고(시설물보수 52-54)

명에 의거 2015년 서초구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사 담당업무 수행중 다음과 같은 사유가 발생하여 시설물공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

□ 공사 현황

공 사 명	계약업체	계약기간	비 고
2015년 서초구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사	금구건설(주) 대표 이덕성	2015. 5. 20 ~ 2016. 4. 30

□ 작업지시 및 연기사유

○ 지시번호 : 시설물보수 52~54

○ 공사위치 : 방배동 941-1 외 2개소

○ 작업내용 : 노후밸브 교체작업

○ 연기사유 : 도로굴착 협의 및 공사지역이 단수범위가 넓어 무단수 작업 등조치가 필요하여 연기요청

○ 공사기간 : 당초 → 2015. 8. 8 ~ 2015. 10. 20

변경 → 2015. 8. 8. ~ 2015. 11. 20

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 조치 의견

○ 상기와 같이 공사기간을 연기하고 본 내용을 계약업체인 금구건설(주) 대표 이덕성에게 통보하여 상수도공사에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 작업연기 요청서 1부.  끝.