문서번호	교량안전과-3179
결재일자	2015.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	기술점검팀장	교량안전과장
유현선	최진우	10/20 이용심

1종 교량 보수·보강공사 감독권한 대행 등 건설사업관리 용역 설계변경(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

안전총괄본부

(교량안전과)

1종 교량 보수·보강공사

감독권한 대행 등 건설사업관리 용역 설계변경(1차)

‘15년 『1종 교량 보수·보강공사 감독권한 대행 등 건설사업관리 용역』을 수행하고 있는 한국건설관리공사로부터 설계변경원이 제출되어 이에 대한  검토 보고 드림

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 1종 교량 보수·보강공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역

○ 기    간 : 2015. 6. 16 ~ 2016. 4. 15 (10개월)

○ 용 역 비 : 695백만원

○ 용 역 사 : ㈜한국건설관리공사(70%),  ㈜우빈기술공사(30%)

Ⅱ		추진경위

○ ‘15. 6. 16 : 용역착수

○ ‘15. 6. 17 : 업무용 차량 추가투입 실정보고(용역사→본부)

○ ‘15. 7. 22 : 휴일 공사추진시 현장관리방안 실정보고(용역사→본부)

○ ‘15. 7. 24 : 분야별 기술자 및 도장전문가 기술자 추가배치 실정보고(용역사→본부)

○ ‘15. 7. 25 : 건설사업관리용역 실정 보고(본부)

- 준공기간 조정, 중급기술자 2인 추가투입, 업무용차량 2대 추가투입, 야간근무대가반영

Ⅲ		설계변경 요청 내용

□ 관련근거 : 교량안전과-13614(‘15.7.24) ’건설사업관리용역 실정보고‘

□ 설계변경 사유

- 건설사업관리 대상공사의 회계연도 변경에 따른 당해년도 준공완료 계획으로 준공기간을 조정하고

- 주요공사에 대한 감리원 추가투입, 업무용차량 추가투입 및 야간공사 대가 등 반영에 따른 설계변경 요청

□  주요 설계변경 반영내용

구 분	당 초	변 경	증. 감	비 고
1.용역기간 조정	‘15.6.16~’16.4.15	‘15.6.16~’15.12.30	감3.5개월	회계연도 변경에 따른 준공기한 조정
2.감리원 추가투입	특급1, 고급 1, 중급5	특급 1, 고급 1, 중급7	증2명(중급)	· 도장감리원(동작, 가양) · 토목감리원(영동, 천호)
4. 업무용 차량	1대	3대	증(2대)
5.야간근무 대가	-	직접인건비의 20%	증 (20%)	교통정체 해소를 위한 야간공사 감리원 대가 반영

□ 건설사업관리 용역비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증. 감	비 고
1. 직접인건비	265,697	278,092	증12,395
2. 제경비, 기술료 포함	361,358	371,465	증10,107
3. 야간대가	-	24,198	증24,198
4. 손해배상공제료	5,400	5,700	증300
5. 부 가 세	63,245	67,945	증4,700
6. 도 급 비	695,700	747,400	증51,700

Ⅳ		조치계획

○ 상기 건설사업관리의 용역사 요청 내용과 같이 설계변경하고 증액되는 용역비 51,700천원은 낙찰차액을 사용하고자하며 감리원 야간근무 대가는 추후 실정산 후 지급하고자함.

○ 감리 예산 현황

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	품의액	낙찰차액	당 초 (계약액)	변 경 (계약액)	증. 감
1. 한강일상유지	1,030,000	770,000	112,651	657,349	709,049	증51,700
2. 도로시설물 (교량)일상유지	154,000	44,946	6,595	38,351	38,351	-
감 리 비	1,184,000	814,946	119,246	695,700	747,400	증51,700

Ⅴ		향후계획

○ ‘15.10.  : 설계변경 및 준공기한 조정

○ ‘15.12.  : 용역 준공

붙임 1. 건설사업관리용역 실정보고 1부.

2. 설계변경 요청서 1부. 끝.