문서번호	설비부-12907
결재일자	2015.10.20.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
박병환	김영수	10/20 박기형

『서울시민 가족자연체험시설 전기공사(철원)』

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『서울시민 가족자연체험시설 전기공사(철원)』

설계변경 검토 보고

『서울시민 가족자연체험시설 전기공사』와 관련 교육정책담당관으로 부터 추가공사 요청이 있어 아래와 같이 설계변경 검토 보고 드림.

관련근거

○ 2015 서울시민 가족자연체험시설 조성사업 추가공사 요청

------------------------- 교육정책담당관-12597(’15.09.15.)호

공사개요

○ 공 사 명 : 서울시민 가족자연체험시설 전기공사(철원)

○ 위    치 : 강원도 철원군 근북면 유곡리 512번지 외 3필지

○ 규    모

- 시설부지 14,801㎡, 지상1층(유곡분교)

- 보안등주(5mx1등용, LED30W)10본, 방송설비 1식, 전기공사 1식

○ 도 급 자 : 학산전력㈜  대표 최돈학

○ 도 급 비 : 72,425,130원

○ 공사기간 : 2015.07.16. ~ 2015.10.30.

설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 주관부서 추가공사 요청에 따른 물량 증가로 변경

○ 설계변경 내용

구 분	주요 설계변경 내용	비 고
옥외 전기설비공사	- 옥외 전력간선 배관, 배선 등 변경
전열, 전등설비공사	관리실 추가로 배관, 배선 등 변경

구 분	주요 설계변경 내용	비 고
CCTV설비공사	- CCTV카메라 4대, DVR 1대 신설 동축케이블, 전원선, 배관 등 신설
보험료 정산	건강·연금·노인장기요양보험료 등 변경

도급비 변경현황

[단위 : 원]

구 분	변 경 현 황		증·감	비고
	당 초	변 경
도 급 비	72,425,130	80,630,000	증8,204,870

※ 공사기간은 변경없음

예산과목

○ 평생교육정책관, 교육정책담당관, 폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성운영, 시설비

보고자 검토의견

○ 추가 공사분 을 설계변경 후 건설총괄부에 변경계약 의뢰코자 합니다.

붙 임 :  1. 관련공문 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.