문서번호	교량안전과-3054
결재일자	2015.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		류봉현	10/20 이용심
협조
	주무관		김시련

영동대교외 1개교량(천호대교) 보수공사

실정보고 검토결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10

안전총괄본부

교량안전과

영동대교 외 1개교량 보수공사 실정보고 검토결과 보고

영동대교 외 1개교량 보수공사 시행 중 1종교량 보수·보강공사 건설사업관리단 실정보고 승인요청에 따른 검토결과 보고임

ⱸ 공사개요

구 분	영 동 대 교	천 호 대 교
위 치	광진구 자양동 ~ 강남구 청담동	광진구 광장동 ~ 강동구 천호동
2. 사업기간	‘15. 6. 3. ~ ’15. 11. 30
3. 공 사 비	786백만원	541백만원
4. 규 모	교면포장 22a - 교면방수 22a 단면복구 986.5㎡ 표면보수 216.0㎡ 공간비계 설치 4,400㎡	교면포장 8a - 교면방수 8a 신축이음 교체 51.5m 단면복구 624.5㎡ 교량받침교체 2개소, 부반력제어장치 1개소
5. 시공회사	㈜엘씨엠이엔지 대표 박미애
6. 총사업비	1,327백만원

ⱸ 실정보고 주요내용

○ 관련근거 : 영동대교 외1개교량 보수공사 실정보고 검토결과 보고(1종교량-205호)

○ 공간비계 설치 변경

- 단면복구 공사를 위한 공간비계의 높이가 거더의 높이와 같은 2.5m로 작업가능 높이를 초과하므로 작업자의 안전성 및 능률향상 위하여 공간비계의 높이가 1.73m로 구조를 변경함

○ 수량 및 공사비 증감내역 : 변경없음

ⱸ 검토의견 및 조치계획

○ 검토의견

1종교량 보수·보강공사 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고 내용을 검토한바 타당한 것으로 사료됨

○ 조치계획

상기 검토의견과 같이 실정보고 내용을 승인 조치하여 공사추진에 만전을 기하고자 하며, 도면에 반영토록 통보하고자 함.

붙 임 : 실정보고 관련문서 1부. 끝.