	동부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 및 준공기한 연기 시행(도로굴착복구 검측감리용역)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2013년 서울특별시 도로굴착복구공사 검측감리용역(강남권역)』에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 준공기한 연기를 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2013년 서울특별시 도로굴착복구공사 검측감리용역(강남권역)

나. 계약업체 : ㈜한국건설관리공사 대표 김 해 수

㈜서경종합기술단   대표 이 민 규

다. 용역기간

1) 당 초  : 2013. 4. 17 ~ 2014. 1. 11

2) 변 경  : 2013. 4. 17 ~ 2014. 1. 16

라. 설계변경내역

구 분	금 액(원)		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
총 용 역 비	330,200,000	329,703,000	감 497,000
공급가액	300,181,818	299,730,000	감 451,818
부가가치세	30,018,182	29,973,000	감 45,182

마. 변경사유 : 감리원투입인원 증감사항 반영에 따른 설계변경

바. 예산과목 : 도시안전, 도로시설물관리, 도로굴착복구지원

도로굴착복구, 시설비및부대비, 감리비(도로굴착복구기금)

따로붙임 1. 설계변경사유서 1부.

2. 준공기한연기사유서 1부.

3. 설계변경방침서 1부.

4. 설계변경도서 1부.  끝.

주무관	이민호		주무관	박일연		도로보수과장	손수희		동부도로사업소장	01/09 송영배
협조자	주무관	이선정		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-193	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 대치동 서울 강남구 남부순환로 3142(대치동 2번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0341	/전송	02-2040-0307	/		/	대시민공개