문서번호	설비부-13066
결재일자	2015.10.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
박병환		김영수	10/21 박기형
협 조

『경춘선 폐선부지 공원조성 공사(2단계)』 전기·통신공사 발주계획 보고

2015. 10

도시기반시설본부

[설 비 부]

『경춘선 폐선부지 공원조성 공사(2단계)』 전기·통신공사 발주계획 보고

「경춘선 폐선부지 공원조성 공사」관련 공원조성에 따른 전기·통신 공사 발주계획 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 경춘선 폐선부지 공원조성 공사(2단계)시행요청

-------------------------------- 공원조성과-11760(‘15.09.09)호

Ⅱ		사업개요

○ 위    치 : 경춘철교 ~ 산업대 3길 고가철교

○ 규    모 : 공원조성 연장(L=1.1㎞), 면적(A=53,860㎡)

○ 개    요

- 공원등주 131 본, 전력간선공사, 건축전기공사, 기타 전기공사

- CCTV설비 13대, 방송설비, 기타 통신설비 공사

○ 사업기간 : 착수일로부터 ~ 2016.10.30.

○ 사 업 비 : 1,013,174천원(도급비 573,944, 관급비 437,181, 이전비 2,049)

Ⅲ		추진경위

○ `15.05.15. : 경춘선1단계 공사 완료

○ `15.08.17. : 계약심사 결과 통보(재무국 계약심사과)

○ `15.09.09. : 2단계 공사 시행요청(공원조성과)

Ⅳ		예산조치

□ 공사비 현황

(단위: 천원)

구 분	총 공사비	전 기	통 신	비 고
총 계	1,013,174	524,538	488,636
도 급 비	573,944	321,031	252,913
관 급 비	437,181	201,458	235,723	조달수수료포함
이 전 비	2,049	2,049	0

Ⅴ		관급자재 구매계획

□ 관급자재

분 야	품 명	수량	금 액	구매방법	비 고
전 기	공원등 (LED 30W)	31	14,570	3자단가
″	공원등 (LED 20W)	100	30,000	3자단가
″	볼라드등 (LED 10W)	101	52,823	3자단가
″	철제공원등주 (3m-1등용)	37	13,986	3자단가
″	철제공원등주 (4m-1등용)	63	30,870	3자단가
″	철제공원등주 (5m-1등용)	31	17,236	3자단가
″	공원등 기초	131	30,785	3자단가
″	볼라드등 기초	101	10,100	3자단가
통 신	CCTV 및 비상벨	1	172,293	3자단가
″	방송설비	1	63,429	3자단가
합 계			436,092		조달수수료별도

Ⅵ		공사발주계획

□ 계약 관련 사항

○ 입찰참가 자격

구 분	관련규정	비 고
전 기	- 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록업체. 서울특별시에 주된 영업소를 둔자.
통 신	- 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 등록업체. 서울특별시에 주된 영업소를 둔자.

○ 현장설명 미실시 : 지방계약법 시행령 제15조 제3항

○ 낙찰자 결정방법 : 지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준 제2장

(안전행정부예규 제19호, ’15.04.10)

○ 하자보증기간 : 지방계약법 시행규칙 제68조 별표 1에 의함

Ⅶ		향후 추진계획

○ `15.11. : 공사 계약 및 착공

○ `16.10. : 공사 완료

○ 위치도

공덕제2철도건널목

육사삼거리

광운대역

경춘철교

2단계

산업대3길고가철교