문서번호	토목부-21980
결재일자	2015.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		진재섭	10/21 노우성
협조

보완 설계용역 타절 보고

< 구리암사대교 연결도로 건설공사 >

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10

도시기반시설본부

(토 목 부)

보완 설계용역 타절 보고

< 구리암사대교연결도로건설공사 >

본 공사의 고덕교 및 고덕보도교 보완설계용역 수행중 고덕보도교가 지하철 하남선(1-2공구) 건설공사와 저촉되어 도시철도토목부에서 공사 시행토록 조정되어 보완설계용역을 타절하고 설계비를 반영코자 보고하는 사항임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교연결도로건설공사

○ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

○ 공사기간 : 2012.8 ~ 2015.12

○ 도 급 비 : 18,242백만원

○ 시 공 사 : (주)신성건설 외2개사

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외1개사

ㆍ2015. 3. 2	:	고덕교 확장관련 공사기간 단축 및 예산 절감방안 검토 지시
ㆍ2015. 4.24	:	고덕교 확장공사 공법 검토보고
ㆍ2015. 4.29	:	고덕교 확장공사 공법 검토보고 승인
ㆍ2015. 5.11	:	고덕교 차로 확장 및 보도교(2개소) 신설에 따른 공법검토 자문회의
ㆍ2015. 5.19	:	자문회의 결과 알림 ※ 본완설계용역비(30백만원) 도급비 반영
ㆍ2015. 6.15	:	보완설계용역 착수계 제출 ※ 원ㆍ하도급 계약 : 2015. 6. 5
ㆍ2015. 6.15	:	고덕교 확장 및 고덕보도교 설치 자문회의 결과 알림
ㆍ2015. 6.30	:	지하철 공사와 저촉되는 고덕교 및 보도교 설치공사 시행 방안 알림 ※ 고덕교 확장(보도교 및 토공부 포함)을 공사타절 검토
ㆍ2015. 7. 3	:	고덕교 및 고덕보도교 보완설계용역 타절 알림

□ 추진현황

□ 설계과업 추진 내용

○ 2회의 자문회의 관련한 공법 검토 및 관련자료 준비

○ 보완실시설계 시행업무 (설계사 제출자료 : 공정율 68.4%)

- 설계도 작성

- 구조계산서 작성

- 설계종합보고서 작성

- 전산화(CD) 작업

□ 설계과업 용역비 조정 현황

(금액단위 : 원)

구 분	전체 용역비	공정율 용역비	타절 준공금 조정 용역비	비 고
보완설계용역비	30,000,000	20,520,000	10,000,000

□ 감리단 검토의견

○ 고덕교 확장 및 고덕보도교 보완설계용역 타절에 따른 정산비용은 타절 시점까지의 추진업무(공법 자문 준비 및 설계 추진내용) 성과 등을 고려 할 때 적정한 것으로 판단되며 추후 설계변경시 반영함이 타당함.

□ 조치의견

○ 상기 감리단 검토의견과 같이 승인하고 추후 설계변경시 정산 처리함이 타당하다고 사료됨.

붙임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.