문서번호	시설관리과-365
결재일자	2014.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관		시설관리과장
이강호		01/09 신동호
협 조
	주무관			이정원
	주무관			최현희
	주무관			우인식

『잠실 실내체육관 우수관 등 정비공사』 실정 검토 보고서(제 2차)

2014. 01.

체육시설관리사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

『잠실 실내체육관 우수관 등 정비공사』

실정검토 보고서(제 2차)

『잠실 실내체육관 우수관 등 정비공사』 시행 중 시공자가 제출한 실정사항에 대하여 검토 보고합니다.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 잠실 실내체육관 우수관 등 정비공사

□ 공사기간 : 2013. 12. 03 ~ 2014. 02. 15

□ 시 공 자 : ㈜한기엔지니어링 대표 송 유 석

□ 도 급 비 : 355,350,000원

□ 주요 공사내용

- 실내체육관 우수관 36개소 신설(스테인레스 D:200mm)

- 석면함유 천정텍스 및 바닥 비닐계타일 철거․설치(운영과사무실 일부, 관리실, 노조사무실, 삼성운영사무실, 노조사무실 등)

2		실정보고 사항검토

(단위 : 천원)

공 종	현황 및 문제점	검 토 의 견 (설계자 의견)	소요예산 (개략금액)
∘ 우수관 설치 개소	∘ 36개 설치토록 설계 되었으나 4개소가 화장실 환기구가 설치되어 있어 우수관 설치 불가	∘ 우수관 36개소→32개소로 변경설치 (우수관 4개소 감소되어도 처리용량 지장 없음)	감 12,189
∘ 천정몰딩	∘ 텍스철거 후 기존 천정몰딩을 재 사용토록 설계되었으나 몰딩이 노후되어 재 사용 불가	∘ 천정몰딩 신설 필요(1,571m) (기존자재 재 사용토록 설계되었으 나 노후 등으로 인한 교체는 발주자 가 판단 사항)	증 8,285
∘ 우수관 설치 방법(2층~ 우수맨홀)	∘ 외부 노출되는 우수관(2층~우수맨홀) 을 고정할 수 있는 지지물이 적어 강풍 시 시설물 안전 위해 요소(16개소)	∘ 우수관 최대한 기둥을 따라 부착․ 고정 필요 (시공사에서 제시한 선홈통 고정방식 합당)	증 3,352
∘ 빗물받이	∘ 스틸그레이팅 32개소 교체토록 설계	∘ 기존 스틸그레이팅 재 사용	감 1,629
∘ 지상 빗물받이 상부 기둥 돌출 턱	∘ 빗물받이 상부에 기둥하부에 턱이 있 어 우수관(200mm)설치시 돌출되어 주차시 우수관 파손 우려	∘ 기둥하부 외부턱 철거후 우수관을 설 치(30개소)하여 우수관 보호	증 1,700
∘ 공무직 남자휴게실 천정 텍스	∘ 기존 천정텍스가 없어 열 손실 발생	∘ 열손실 방지를 위해 천정텍스 설치 (12㎡)요함	증 351
합 계			감 130

□ 사업비 변경 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	금 액	계약금액	1차 설계변경(A) ‘14. 1. 2 시행	제 2차 실정보고(B)	비 고 (B-A)
잠실실내체육관 우수관등 정비공사	도 급 금 액	350,720	355,350	355,220	감 130
	이 전 비 (냉․난방기 이전 등)	7,952	7,952	7,952
	총 공사금액	358,672	363,302	363,172	감 130

3		조 치 의 견

□ 위와 같이 공사내용을 변경 시행하고 설계변경(제 2차) 처리코자 함