의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-22124
결재일자	2015.10.22.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	건설총괄부장

주무관		터널건설과장	토목부장	시설국장		결재
강철규		권혁대	노우성	10/22 형태경
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 139번, 이석주 의원,도시안전건설위원회)

시의원 요구자료(요구번호 139번)를 따로붙임과 같이 제출코자 합니다.

붙임 : 시의원 요구자료 요구자료 1부.  끝.

이석주 의원(도시안전건설위원회, 새누리당)

139. 응봉교 확장 및 성능개선 공사 관련

1) 사업개요(목적,위치,규모,사업기간,총사업비,계획공정율,현재공정율, 계획대비 실공정율

2) 연도별/항목별 예산편성 및 집행 현황

3) 설계변경 계획(검토중인 경우 현장실정보고 서류 제출)

4) 응봉교 철거업체 및 정산 내역

5) 방음벽 설계공모 현황(공모 공고문, 공모기간, 공모 접수작품 수, 공모작품 심사위원 명단, 심사결과, 수상순위, 수상자명, 작품명)

6) 당선자 혜택

7) 설계용역 업체명, 설계용역기간, 설계용역비

8) 설계용역 준공후 현재까지 추진실적(구체적으로 작성)

9) 물가변동에 의한 계약금액조정(ES), 모든 회차 설계변경 이력, 상세내역서,

사유서

1) 응봉교 확장 및 성능개선 사업개요

○ 사업목적 : 고산자로와 성수대교축의 왕복 6차로에 맞춰 왕복 4차로인

응봉교를 확장하여 교통 병목현상에 따른 교통정체 해소

○ 위    치 : 응봉동 대림아파트 앞 ～ 성수1가 삼표레미콘 앞

○ 규    모 : 응봉교 확장 (B=4차로 → 6차로, L=633m)

성능 개선 (DB-18 → DB-24)

○ 공사기간 : '08.10.17.  ～ '15.12.31

○ 총사업비 : 88,154백만원

○ 공 정 율

- 실행 93%

- 계획 95%

- 계획대비 실공정율  98%

2) 연도별/항목별 예산편성 및 집행현황

(단위 : 백만원)

연도별	예산/집행	계	시설공사비	보상비	감리비	비 고
2008	예산액	5,200	5,000		200
	집행액	4,200	4,000		200
2009	예산액	14,000	13,600		400
	집행액	13,091	12,691		400
2010	예산액	10,000	9,390		610
	집행액	9,989	9,379		610
2011	예산액	9,000	8,550		450
	집행액	9,000	8,550		450
2012	예산액	15,000	13,550	600	850
	집행액	14,995	13,814	331	850
2013	예산액	10,000	9,300		700
	집행액	9,793	9,093		700
2014	예산액	6,600	5,500	400	700
	집행액	6,586	5,599	324	700
2015	예산액	7,264	6,906		358
	집행액	7,264	7,080		184

3) 설계변경 계획

(단위 : 백만원)

연번	건 명	당 초	변 경	증 감	비 고
1	보도부 포장재 변경	112	114	2
2	시점부 우측 기존 옹벽 정비		124	124
3	차량방호울타리 등급 변경	95	119	24
소계		207	357	150

4) 응봉교 철거업체 및 정산내역

(단위 : 백만원)

업체명	계약일	계약기간	도 급	하 도 급	비고
㈜성수프론티어	2010.08.09	2010.8.9. ~ 2014.5.30	2,635	1,795	타 절
해마건설㈜	2014.12.15	2014.12.15~ 2015.12.31	1,450	1,210

5) 방음벽 설계공모 현황

○ `14.11.26 설계공모 위탁(새건축사 협의회) 추진

-「국토교통부고시 제2014-345호」 ‘건축 설계공모 운영지침“ 제29조에 따른 지명 제안공모 추진

- 서울시 공공건축가로 선정되어 활동하고 있는 건축가와 최근 문화체육관광부 주관 젊은건축가상 수상자 중 선정위원회 심사를 거쳐 공모 참여자로 선정된 건축가

○ `14.12.23 설계공모 지명자에게 현장 설명

- 설계공모지명자 : 김수영(건축사사무소 숨비), 정현아(디아건축사사무소),이정훈(조호건축)

○ `14.12.24~`15.1.15 : 공모 및 접수마감 (3개 작품 접수)

○ `15.1.16~1.22 : 기술심사 및 최종심사 (새건축사 협의회)

- 심사위원 : 김영섭(위원장), 이소진, 김용미, 이충기, 한형우

- 당 선 자 : ㈜디아건축사사무소(대표 정현아)

※ 심사위원 만장일치로 수상자(디아건축)를 선정 (2·3위 순위는 없슴)

6) 터널형방음벽 기본디자인 당선자 혜택

○ 당선자의 기본디자인에 맞추어 시공사와 협업으로 「기본 및 실시설계」

7) 응봉교 확장공사 설계현황

○ 설계용역업체 : ㈜제일엔지니어링, ㈜천일

○ 설계용역기간 : 2006.12.18. ~ 2008.2.20

○ 설계용역비   : 929백만원

8) 설계용역 준공후 현재까지 추진실적

○ `08. 07. 31 : 공사발주(조달 의뢰)

○ `08. 10. 17 : 공사계약 및 공사착수

○ `10. 04.    : 중랑천내 가설교량(왕복 4차로) 설치

○ `10. 5. ~ `11. 12.  : 중랑천 구간 응봉교 철거 및 재설치

○ `11. 12.    : 중랑천 횡단 주경간 아치 설치

○ `12. 04.    : 시점부 왕십리방향 기존교량 2차로 철거 완료

가교 설치 등 단계별 교통처리계획(일 58,000대 통행유지)

○ `13. 11.    : 시점부 왕십리방향 3개차로 개통

○ `14. 06.    : 동부간선도로 횡단구간 강교 가설 완료

○ `14. 12.    : 시점부 6차로 공사완료, 4차로 개통(가설교량으로 우회)

○ `15. 1. ~ `15.  2.  : 철도횡단구간 기존 교량 철거

○ `15. 2. ~ `15.  7.  : 철도횡단구간 교량 건설 (2 경간)

○ `15. 7. ~ `15. 10.  : 방음벽 설치

○ `15. 8. 31  : 신설 교량 왕복 4차로 우선 개통

○ `15. 10월말 : 신설 교량 왕복 6차로 개통(예정)

○ `15. 11월중 : 응봉교 하부도로 회전교차로 설치 등 정비완료(예정)

9) 물가변동에 의한 계약금액조정(ES), 모든 회차 설계변경 이력, 상세내역서,

사유서

○ 물가변동에 의한 계약금액 조정(ES)

물가변동	계약일	반영금액	비고
1차	2010.12.24	729,981,000	3.27%
2차	2011.12.26	555,537,000	3.06%
3차	2014.08.25	341,425,000	3.62%

○ 설계변경 이력 및 내역, 사유서

	변경일	공종 및 수량	설계변경 사유	변경금액		비 고
1회	2010년 6월21일	교통정보시스템케이블외 14건	현장여건 반영	당초 :	32,927,400,000
				변경 :	34,238,600,000
				증감 :	1,311,200,000
2회	2010년 12월24일	가설교량 안전시설물 설치외 14건	물가변동(1차) 및 현장여건 반영	당초 :	34,238,600,000
				변경 :	35,444,200,000
				증감 :	1,205,600,000
3회	2011년 12월26일	2,3차 가설교량 설치공사외 7건	물가변동(2차) 및 현장여건 반영	당초 :	34,238,600,000	2012.05.08
				변경 :	39,571,400,000	2013.12.31
				증감 :	5,332,800,000
4회	2012년 12월25일	기존교량 일부 철거에 따른 켄틸레버부보강공사외7건	현장여건 반영	당초 :	39,571,400,000
				변경 :	40,076,300,000
				증감 :	504,900,000
5회	2013년 9월25일	접속부 강교가설공법 변경외 9건	현장여건 반영	당초 :	40,076,300,000
				변경 :	45,595,110,000
				증감 :	5,518,810,000
6회	2013년 12월24일	기간연장	현장여건 변경	당초 :	45,595,110,000	2013.12.31
				변경 :	45,595,110,000	2015.12.31
				증감 :	-
7회	2014년 8월25일	3차가교 철도구간(계측)외 7건	물가변동 반영(3차) 및 현장여건반영	당초 :	45,595,110,000
				변경 :	46,455,465,000
				증감 :	860,355,000
8회	2015년 5월13일	공동사 탈퇴에 따른 지분율 조정	공동사 탈퇴에 따른 지분율 변경	당초 :	46,455,465,000
				변경 :	46,455,465,000
				증감 :	-
9회	2015년 6월30일	시점부 터널형 방음벽외 20건	민원에 의한 현장 설계 반영	당초 :	46,455,465,000
				변경 :	55,454,894,000
				증감 :	8,999,429,000
계				당초 :	32,927,400,000
				변경 :	55,454,894,000
				증감 :	22,527,494,000

끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토 목 부)	담당사무관	권혁대
	☎ 3708-2567	주무관	강철규
	작 성 일 : 2015.10.21.