문서번호	녹지관리과-9983
결재일자	2015.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장
이은국	박병구	10/22 김윤철
협 조

-한양도성 순성길 정비사업 폐기물처리용역 -

준공기한 연기 검토 보고

2015. 10.

-한양도성 순성길 정비사업 폐기물 처리 용역-

준공기한 연기 검토 보고

「한양도성 순성길 정비사업 폐기물 처리용역」시행 중 현장여건에 따른 물량 증가 등으로 절대공기가 부족하여 공사기간 변경을 검토하고 아래와 같이 보고 드립니다.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 한양도성 순성길 정비사업 폐기물처리용역

○ 위    치 : 남산 한양도성 2km(배드민턴장, YTN 옆), 낙산전망대 주변

○ 용역기간 : 2015.09.14 ~ 10.28

○ 용역내용 : 폐기물 운반 및 처리 135.51톤

○ 도급업체 : ㈜ 에스제이티[대표 강은숙]

○ 도 급 액 : 금3,686,000원(금삼백육십팔만육천원)

□ 준공기한 연기

○ 연기기간

- 당    초 : 2015.09.14  ~ 10.28

- 변    경 : 2015.09.14  ~ 11.15

○ 연기사유

- 사업대상지 내 내역에 없는 물량(잡목 등) 증가분 반영 및 남산구간 석축 해체에 따른 폐기물 처리량 검토 등 현장여건에 따른 절대 공기 부족

○ 지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재는 우리 사업소로 지체상금 미부과 대상임

□ 보고자 의견

○ 상기와 같이 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.  끝.