투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기의뢰 및 변경 구매(보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업)

1. 시설과-5332(2015.10.22.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인 『보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업』과 관련하여 아래돠 같이 관급자재 납품기한 연기 및 변경 구매 하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업 관급자재 구매

나. 변경 계약 요청

구분	나라장터물 품식별번호	품 명	규 격	단위	수량	단가	계약자	비 고
당초	22312799	종합안내판	1200×900mm	EA	1	1,676,100	파란
변경	22312800	종합안내판	1200×750mm	EA	1	1,632,700	파란

다. 납품기한 변경

- 당 초 : 2015. 10. 23

- 변 경 : 2015. 10. 31

라. 연기사유 : 추가공사로 인한 선행공정 지연으로 납품기한을 본 공사 일정에 맞추어 납품기한 연기

마. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 준공기한 연기 검토 보고. 1부.  끝.

주무관	최종성		시설팀장	代윤유환		주무관	代지정희		시설과장	10/22 진병규
협조자
시행	시설과-5335	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1161	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개