투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업)

1. 시설과-5332(2015.10.22)호의 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 「보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업

나. 공사기간 : 2015. 8. 12 ~ 2015. 10. 24

다. 도 급 액 : 149,620,210원

라. 도 급 자 : (주)다원녹화건설 대표 김용각

마. 준공기한 연기

- 당초 : 2015. 8. 12 ~ 2015. 10. 24

- 변경 : 2015. 8. 12 ~ 2015. 10. 31

바. 지체상금 부과검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 준공기한연기 검토보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	최종성		시설팀장	代윤유환		시설과장	10/22 진병규
협조자
시행	시설과-5334	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1161	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개