문서번호	배수과-7507
결재일자	2015.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장
박종혁	이임섭	10/22 이규상
협 조
	주무관		신근호

’15년 노후 송∙배수관정비사업

예산재배정 검토보고

2015. 10.

상수도사업본부

(급수부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

’15년 노후 송∙배수관정비사업

예산재배정 검토보고

’15년 노후 송∙배수관정비사업 중 사업소별 예산 추가배정 요청사항을 검토하고 결과를 보고드림.

□ 당초 수도사업소별 추진계획 및 예산현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	본부
건수	27	4	3	5	3	2	2	3	4	1
연장 (km)	18	3.1	2.15	2.67	1.75	1.37	1.2	3.06	2.6	0.1
예산액 (백만원)	37,600	6,200	3,100	6,900	2,700	1,900	3,000	4,405	6,200	3,195

□ 예산 재배정 검토

○ 송∙배수관정비공사 발주잔액 : 2건

수도 사업소	사 업 명	사 업 개 요	사업비(백만원)		검토내용
			당 초	변 경
	계		2,200	1,300 (감900)
서부	마포구청사거리~성산2교간 송배수과 정비공사	D=700㎜ L=730m	1,900	1,100 (감800)	비굴착공법 적용에 따른 계약심사 결과에 따른 발주잔액
서부	남가좌동 457번지 일대 송배수관 정비공사	D=300~500㎜ L=300m	300	200 (감100)	발주잔액

○ 수도사업소별 추가 예산배정 요청내역

연번	사업소	공사명	공사개요	예산액 (백만원)	예산 요청 사유	비고
		9건		1,771
1	동부	동일로 송배수관 정비공사	D=1,000mm L=700m	155	지장물 하월 2개소 추가
2	동부	용두역 주변 송배수관 정비공사	D=900mm L=240m	150	내면에폭시 분체도장관 사용으로 인한 관급자재비 증가
3	동부	광진구 광장동 237-14 유량계 설치	D=500mm 유량계 설치 1개소	56	아차산배수지 계통 중블록 재구축 관련 유량계설치
4	동부	금호1가동 126번지 일대 수계전환 공사	D=300mm, L=120m	90	금호1가 126번지 일대 수계전환 ∙대현산(가압장)→대현산배수지
5	북부	청백아파트~창동길 도로개설사업구간내 송배수관 부설	D=600mm L=350m	500	도로개설사업과 병행하여 송배수관 부설하여 순환광망 형성
6	강서	양천향교역~발산역간	중간제수밸브 설치 (D=1000mm 1개소)	100	중간제수밸브 설치로 향후 누수발생시 단수 없이 수계전환
7	강서	강서구청사거리~등촌역 배수관정비공사	D=700mm, L=1,096m	160	내면에폭시 분체도장관 사용으로 인한 관급자재비 증가
8	강남	봉은배수지 통수관련 기존증압장 우회 공급관로 부설	D=200~300mm L=120m	260	봉은배수지 통수 추진에 따른 기존 증압장(7개) 공급 우회배관 부설
9	강동	명일동 309-1~46-4번지 간 송배수관 정비공사	D=800mm L=770m	300	내면에폭시 분체도장관 사용으로 인한 관급자재비 증가

○ 검토결과

- 동부(동일로 송배수관 정비공사)	미반영

•본 공사는 년차별 계획에 따른 계속공사 구간으로 금회 공사에 포함된 천호대로 연결공사는              예산부족으로 금년도 정비대상에서 제외하고 향후 잔여구간 공사 시 반영

- 동부(용두역주변 송배수관 정비 및 D500mm 유량계 설치 1개소)	반영

- 동부(금호1가 126번지 일대 수계전환공사)	반영

•당초 대현산(가압장)에서 대현산배수지 간접급수체계로 전환하여 예산절감

- 북부(청백아파트~창동길간 도로개설구간)	반영

•월계2동 지역 순환배관망 형성을 위하여 관로부설이 필요함.

•관경 축소 : 향후 월계2동 아파트 등 급수수요를 감안하여 D300mm로 부설하고, 2015년                           공사시행이 가능한 구간(L270m) 우선시행하고, 잔여구간은 향후 도로개설사업과                        병행하여 시행(‘15년 시행:D300mm, L=270m(250백만원)

- 강서(양촌향교역~발산역간)	반영

•동 관로는 전식 등 누수 다발관로(최근 5년간 총9건 발생)로 ‘92년 부설된 관로이지만 택지개발시점에 부설된 것으로 감안 훨씬 이전에 부설 된 관로이며,누수발생 시 대규모 단수 수반 되어 시민불편 초래

•중간제수밸브 설치하여 대규모 단수발생을 사전 예방

- 강서(강서구청사거리~등촌역간)	반영

- 강남(봉은배수지 통수관련 증압장 우회배관 부설)	미반영

•봉은배수지 통수관련 기존 증압장(7개소)을 폐쇄하기 위해 우회배관을 시행하여야하나          통수과정에서 봉은배수지 급수체계에 대해 재 검토 중에 있어 금회 사업에 제외

- 강동(명일동 309-1~46-4번지간)	반영

□ 사업소별 예산 재조정 내용

부서별	소요예산(백만원)				공사 건수
	기 배정액	금회배정	최종 배정액	배정잔액
계	36,172	1,106	37,600	-	27
시설안전부	1,657	-	1,657	-	1
중부	6,200	-	6,200	-	4
서부	3,100	- 900	2,200	-	3
동부	6,900	296	7,196	-	6
북부	2,700	250	2,950	-	3
강서	1,900	260	2,160	-	1
남부	3,000	-	3,000	-	2
강남	4,405	-	4,405	-	3
강동	6,200	300	6,500	-	4
기타	110	-	110		-
부대비		-	10	-	-
대행사업비		-	940	-
예비비		-	272	-	-

□ 향후 조치계획

○ 기획예산과 예산 재배정 요청

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비  (송∙배수관정비, 노후 송∙배수관정비)

첨부 : 위치도 1부.  끝.