문서번호	토목부-22063
결재일자	2015.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	광역도로과장	토목부장
박상철	진재섭	10/22 노우성

공사 설계변경 시행 보고(4차제1회)

(율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

공사 설계변경 시행 보고

「율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사」의 공종을 현장 여건 변동에 맞게 설계 변경하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

◦ 공 사 명 : 율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사

◦ 공사규모 : 지하차도 폭 6차로, 길이 320m

◦ 공사금액 : 306억원

◦ 공사기간 : 2015.03.02 ~ 2016.04.29

◦ 시 공 사 : (주)북일종합건설외 2개사

◦ 감 리 사 : ㈜한국해외기술공사외 1개사

□ 설계변경내용

○ 4차 제1회

▷ 주요변경사항

- 회계연도 예산 사용에 맞게 내역 변경

▷ 변경내역

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증∙감	비 고
4차공사	4,202,000	3,876,000	감)326,000
도급비	3,800,000	3,474,000	감)326,000
관급자재비	402,000	402,000	변경없음

▷ 준공기한 : 변경없음

□ 조치의견

◦ 감리단으로부터 제출된 설계변경 내용을 4차공사 계약 물량으로 설계변경 하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1. 공사설계변경내역 1부(4차).

2. 감리단 보고서 1부.  끝.