문서번호	시설보수과-6010
결재일자	2015.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		시설보수과장		동부도로사업소장
김종범		박용선		10/23 임대성
협 조
	도로보수과장				김환겸
	기전과장				남궁영주
	주무관				나철흠
	주무관				조장호

회 의 결 과 보 고

(택지개발지구내 도로.․시설물 및 지하철공사구간 도로 인수.인계 관련)

2015. 10.

동부도로사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

회 의 결 과 보 고

(택지개발지구내 도로.․시설물 및 지하철공사구간 도로 인수.인계 관련)

1		회 의 개 요

○ 일    시 : 2015. 10. 19(월) 14:00~16:00

○ 장    소 : 동부도로사업소 2층 회의실

○ 참석 현황 : 25명

- 시공관계자 16명 : 발주처 8명, 시공사 4명, 감리 4명

- 유지관리기관 9명 : 시설보수과장외 8명

○ 회의안건 : 도로 등 시설물 인수.인계 관련 재반 사항

2		인 수 대 상

○ 택지개발지구 내 도로 및 시설물 현황

- 도로 및 시설물

시설명	위 치	개 요	시공사	준공예정일	담당	공정 (%)	비고
탄천우안도로 지하차도	송파구 문정동	B=8.5~11.5m L=370m(상행) L=470m(하행)	㈜엠지엘 대보건설(주)	2015.10.13	김종범	90	SH
위례1지하차도	송파구 장지동 ~하남시 학암동	B=16.8m L=628m	금호산업(주)	2015.12.30	나철흠	80	LH
장지지하차도	송파구 장지동 ~성남시 창곡동	B=18~24m L=1,275m	진흥기업(주) 홍익산업개발(주)	2016.03.30	조장호	80	SH
새말로	숯내교~송파대로	B=30~40m L=715m	영진종합건설(주)	2015.11.15	송광석	95	SH

- 기전 및 기타 관리동 시설물

시설명	비 상 발전기	배수 펌프	CC TV	조명 시설	FAN	전광판	진 입 차단막	집수정	관리동
탄천우안도로 지하차도	1대	3대	-	100개	-	-	-	1개소	1개동
위례1지하차도	-	-	4대	468개	-	-	-	-	-
장지지하차도	1대	12대	22대	932개	14대	2개소	2개소	3개소	1개동

○ 지하철 건설공사 구간 도로

시설명	위 치	개 요	시공사	준공예정일	담당	공정 (%)	비고
지하철915공구	언주역 ~선정릉역	아스콘포장 151a 노면표시 1,701㎡	경남기업 (현대산업개발)	2014.12.31	탁영우	100	준공
지하철916공구	삼성중앙역 ~봉은사역	아스콘포장 288a 노면표시 3,330㎡	현대산업개발	2015.9.30	탁영우	100	준공

3		발주처에 협조 요청한 사항

○ 시설물 인수.인계 전 “시설물 인수.인계 목록” 자료 사전 준비 요청(붙임)

- 시설물 인수.인계전 사전에 인수.인계 자료를 준비하여 인수.인계가  원활히 이루어 질수 있도록 조치

○ 1차 협의사항의 조속한 조치 요청

- 탄천우안도로지하차도

∙ 충격흡수시설 설치

- 장지지하차도

∙ U타입 구간의 교통사고 예방과 소음절감을 위한 방안 조속 결정

- 지하철 공사구간

∙ 요구 자료 제출 및 인수.인계 조치 요구

○ 1차 외부전문가 점검사항의 조속한 조치 요청

- 탄천우안도로지하차도

∙ 균열 현황도 및 보수 적용 공법을 정리하여 유지관리 부서에 인계 등(붙임)

- 장지지하차도

∙ 측벽부 도색을 타일로 변경 검토 등(붙임)

- 위례1지하차도

∙ U타입 구간의 차량소음에 대한 민원 가능성 사전 검토 등(붙임)

○ 2차 외부전문가 현장 점검에 협조 요청

- 시공완료 및 시공중인 시설물의 2차 외부전문가 현장 점검에 협조요청

4		향 후 계 획

○ 외부전문가 2차 현장점검(예정)

- 현장점검 일자 : 2015. 12월 중

- 현장점검 방법 : 외부전문가 및 시공관계자와 합동점검

- 주요 점검 내용

∙ 1차 점검 지적사항에 대한 조치현황 점검

∙ 유지관리 상 보완이 요구되는 사항 점검 등

○ 3차 합동 회의 개최(예정)

- 회의 일자 : 2015년 12월 15일(화) 14:00~16:00

- 참석 대상 : 16명

∙ 택지개발 지구내 도로시설물 : 시공관계자 8명, 유지관리기관 8명

- 회의 안건 : 도로시설물 인수.인계 관련 재반 사항

※ 택지개발지구 내 도로(새말로) 및 지하철공사구간(915공구, 916공구) 도로는 10월 중 현장점검 후 11월 중 인수․인계 완료예정

따로붙임 : 1. 회의자료(2차)  1부

2. 시설물 인수.인계 목록 1부.

3. 1차 협의사항 조치 현황 1부.

4. 외부전문가 점검사항 조치결과 1부.

5. 회의 참석자 명단 1부.  끝.