문서번호	시설관리과-373
결재일자	2014.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장	체육시설관리사업소장
진종구		신동호	01/09 박준양
협 조
	주무관			권태섭
	주무관			김석수

용역 준공기한 연기 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시설관리과

준공기한 연기 보고

『잠실 및 목동운동장 자가발전설비 설치공사 실시설계 용역』과 관련하여 아래와 같이 연기사유가 발생하여 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 잠실 및 목동운동장 자가발전설비 설치공사 실시설계 용역

○ 용역기간 : 2013. 11. 12. ~ 2014. 01. 12.

○ 계약금액 : 35,948,000원

○ 계 약 자 : 선진엔지니어링 종합건축사사무소  대표자 함인선

○ 용역내용 : 잠실 및 목동운동장 자가발전설비 설치공사 설계

□ 준공기한 연기

○ 연기사유 : 용역 과업내용 추가

- 발전기와 한전 상용전원 병렬운전 중 상용전원 정전시 발전기 과부하 방지를 위한 계통연계기 설치 타당성 검토

- 발전기와 병렬운전시 한전 수전단 ALTS적정 운영방안 검토

- 메탈할라이드 점소등 특성 검토

○ 준공기한 연기

․ (당초) 2014. 1. 12 → (연기) 2014. 2. 20

□ 조치의견

○ 위와 같이 준공기한을 연기하여 용역추진에 만전을 기하고자 함.