“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	「1종 교량 보수·보강공사 감독권한 대행 등 건설사업관리 용역」 설계변경(1차) 시행

1. 교량안전과-3179(2015.10.20)호와 관련입니다.

2. 우리시에서 시행중인 「 1종 교량 보수·보강공사 감독권한 대행 등 건설사업관리 용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 1종 교량 보수·보강공사 감독권한 대행 등 건설사업관리 용역

나. 도 급 자 : ㈜한국건설관리공사외 1개사

다. 착 수 일 : 2015. 6.16

라. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	도 급 비	용역기간	비 고
당 초	695,700,000	2015.6.16 ~ 2016. 4.15
변 경	747,400,000	2015.6.16. ~ 2015.12.30

마. 예산과목

1) 교량관리, 한강교량관리, 한강교량일상유지보수, 시설비 및 부대비, 감리비

2) 교량관리, 일반교량관리, 도로시설물(교량)일상유지보수, 시설비 및 부대비, 감리비

바. 설계변경사유

- 건설사업관리 대상공사의 회계연도 변경에 따른 당해년도 준공완료 계획으로 준공기한 조정

- 주요공사에 대한 감리원 추가투입, 업무용차량 추가투입 및 야간공사 대가 등 반영에 따른 설계변경

붙임  1. 건설사업관리용역 설계변경 방침서 1부

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

★주무관	유현선		기술점검팀장	代유현선		교량안전과장	10/23 이용심
협조자	계약1팀장	김점선
시행	교량안전과-3440	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 2층 서울특별시 교량안전과	/
전화	2133-1964	/전송	2133-1429	/		/	대시민공개