문서번호	도로보수과-10431
결재일자	2015.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
최완	이석재	10/23 노영석

『2015년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』

설계변경(2회) 검토 보고

2015. 10.

북부도로사업소

[도로보수과]

설계변경(제2회) 검토 보고

- 2015년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가) -

우리 사업소에서 시행중에 있는『2015년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』와 관련 각종 불량맨홀정비 도로평탄성 유지를 위한 침하,파손, 매몰 등 민원사항 및 안전사고 예방 추진를 위한 설계변경 검토보고 사항임.

관련근거

○ 2015년 불량맨홀정비공사 추가 재배정 통보 : 도로관리과-1558호

⇒ 추가 배정액 : 80,000천원

공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

○ 공사개요 : 불량맨홀정비 648개소

○ 공사기간 : 2015.05.21 ~ 2015.12.31

○ 공사금액 : 493,000,000원

○ 도 급 자 : ㈜우암건설  대표 고원준

설계변경 사유

○ 불량맨홀 정비비 추가 재배정에 따른 사업비 반영

○ 유관기관별 각종 맨홀정비에 따른 공종별 수량내역 조정

※ 2015년 불량맨홀정비 예상 물량 : 800개소

설계변경 내역

○ 공사비 변경내역

(단위:원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비		500,000,000	580,000,000	증) 80,000,000
도급비	공급가액	448,181,819	520,909,091	증) 72,727,272
	부가가치세	44,818,181	52,090,909	증) 7,272,728
	계	493,000,000	573,000,000	증) 80,000,000
이 전 비		7,000,000	7,000,000	-

○ 주요공종 변경물량

공 종	규 격	구분	단위	수 량			증 ․ 감	비 고
				당 초	변 경
하 수	∅648	주,야간	개소	165		254	증 89
상 수	∅648	주,야간	개소	97		142	증 50
하수,통신	∅766	주,야간	개소	124		171	증 47
통신,전기	∅918	주,야간	개소	121		155	증 34
통신,전기	∅1080	주,야간	개소	36		19	감 17
통신,전기(사각)	1080*580	주,야간	개소	50		25	감 25
특수소형	∅256	주,야간	개소	55		36	감 19
계			개소	648		802	증 154

조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 맨홀정비정비비 재배정 반영과 도로평탄성 확보를 위한 각종 맨홀정비 유형별 수량조정을 예산범위내에서 설계변경을 시행 불량맨홀정비 사업추진에 만전을 기하고자 함 .

첨부 : 설계변경도서(2회) 1부.   끝.