투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2회) - 2015년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)-북부

우리사업소에서 시행중인 2015년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)-북부

나. 공사기간 : 2015. 05. 21 ~ 2015. 12. 31

다. 도 급 자 : ㈜우암건설  대표 고원준

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비		500,000,000	580,000,000	증) 80,000,000
도급비	공급가액	448,181,819	520,909,091	증) 72,727,272
	부가가치세	44,818,181	52,090,909	증) 7,272,728
	계	493,000,000	573,000,000	증) 80,000,000
이 전 비		7,000,000	7,000,000	-

마. 설계변경사유 : 기관별 맨홀정비 수량 증,감에 따른 설계변경

바. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로

정비공사, 시설비및부대비, 시설비

따로붙임  1. 보고서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의각서 1부.   끝.

주무관	최완		도로보수과장	이석재		북부도로사업소장	10/23 노영석
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-10434	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동)	/
전화	02-944-5436	/전송	02-945-5072	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개