의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-22222
결재일자	2015.10.23.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		도시고속도로과장	토목부장	시설국장		결재
시희식		명경출	노우성	10/23 형태경
협 조
	주무관				김구

제 목	김진영 시의원 요구자료 제출(요구번호 29번, 도시안전건설위원회, 새누리당)

시의원 요구자료를 따로붙임과 같이 제출하고자 합니다.

붙  임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

김진영 시의원(도시안전건설위원회, 새누리당)

1. 요구번호 : 29번

○ 강남순환도시고속도로 건설공사 재정구간에 대한 다음 자료

- 사업개요[목적, 위치, 규모, 사업기간, 총사업비, 공정율(전체,  각 공구별로 구분하되 계획, 현재, 계획대비 실공정율로 작성)]

- 각 공구별 현재까지 추진실적

- 각 공구별 현재 시공 중인 공종 현황

□ 강남순환도시고속도로 건설공사 재정사업

1) 강남순환도로 4공구 건설공사

○ 사업개요

- 목 적 : 내부순환형 도시교통망 건설로 교통량 분산 및 동서간 교통환경 개선을 통한 지역간 균형발전에 기여

- 위 치 : 서울시 금천구 독산동 ~ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

- 규 모 : 도로개설 연장 2.48m(폭 4~8차로)

- 사업기간 : 2001. 12. 29 ~ 2016. 05. 19

- 총사업비 : 3,286억원

- 공정율(계획/현재/계획대비 실 공정율) : 59.9% / 57.2% / 95.5%

○ 현재까지 추진실적

-  기아대교 개수공사(3차로 235m) 완료(‘09.07)

-  소하JCT 교량공사(폭 2~8차로, 연장 2,280m)

․교각41기 완료, 강교(14,306톤) 설치완료.

- 서해안고속도로 접속도로(폭2~4차로, 연장 480m)

․성토 220m(폭2차로), 보강토 260m 시공 중(폭4차로)

- 시점부 지하차도 토공 및 가시설 설치

○ 현재 시공 중인 공종현황

-  소하JCT 교량공사(폭 2~8차로, 연장 2,280m)

- 서해안고속도로 접속도로 가시설 설치공사

- 시점부 지하차도 및 본선 도시계획도로

․지하차도 가시설 2단 설치 중(760m 중 70m)

- 시흥IC 램프 및 남북간 연결도로

․남북간 연결도로 지하차도 설치공사(31m중 13m 완료)

2) 강남순환도로 8공구 건설공사

○ 사업개요

- 목  적 :강남지역 동서연결도로인 남부순환로 및 올림픽대로의 교통량을 분산

- 위  치 : 서울시 서초구 우면동~과천시 주암동~강남구 수서동

- 규  모 : 총연장 L=7.96km, 4~10차로

(교 량 2개소, L=0.54km, 지하차도 4개소, L=2.79km))

- 사업기간 : 2002.07.03.~2018.07.31

- 총사업비 : 3,552억원

- 공정율(계획/ 현재/ 계획대비 실 공정율) : 31.9% /28.4%  /89.0%

○ 현재까지 추진실적

- 구룡지하차도 완료(4차로, 770m)

- 본선교량 교각 8기 중 4기 완료

- 광역상수도 서울시 구간 이설 완료(1,613m)

- 주암교(8차로, 65m)완료

○ 현재 시공 중인 공종현황

- 본선교량 P8, A2 기둥 공사

- 광역상수도 과천시 구간 이설 공사 (관경 2,000mm, 연장 660m)

- 화물터미널 앞 지하차도(4차로, 900m) 가시설 설치 공사 .   끝.

작성자	기관명 ( 부서명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도시기반시설본부 토목부)	담당사무관	명경출
	☎3708-8662	주무관	시희식 김 구
	작 성 일 : 2015. 10.

이곳에 본문을 입력하세요