준공기한 연기보고서(신설-188, *********)

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김찬모	代이준호	10/23 박길영

	명에의거 “2015년 은평구 관내 상수도공사” 시행중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.
2015. 10. .
복명자 : 직 지방시설주사 성명 : 김 찬 모

복 명 내 용
건 명	준공기한 연기보고서(신설-188, *********)
내용	1. 공사위치 : ***************** 2. 작업지시번호 : 신설-188 3. 급수공사 종별 : 신설(임시급수) 4. 보고내용 - ************************************************************************* 5. 조치의견 - 상기위치의 급수공사 준공기한을 아래와 같이 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다. ◆ 당초 공사기간 : 2015. 10. 5 ~ 2015. 11. 3 변경 공사기간 : 2015. 10. 5 ~ 2015. 11. 14 6. 지체상금 부과여부 : 미부과
비 고

끝.