투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	내부결재
(경유)
제 목	백인제가옥 사무동 기단바닥 보수공사 설계변경 시행

시설과-6498호(2015.10.23.)와 관련 백인제가옥 사무동 기단바닥 보수공사 시행 중 변경사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경 및 준공기한 연기를 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 백인제가옥 사무동 기단바닥 보수공사

2. 공사기간: 2015. 10. 16. ~ 10. 25.

3. 공사내용: 사무동 기단바닥 보수(23㎡)

4. 도 급 자: (주)티엠새한 대표 조성익

5. 변경내용: 사무동 내부벽 타일 철거 및 신설(8.7㎡)

6. 도급금액 및 준공기한 변경사항
(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
도급금액	5,115,000	5,500,000	385,000
준공기한	2015. 10. 25	2015. 10. 30	5일간

7. 예산과목: 역사와 문화의 복합공간창조, 관람지원기반 구축, 백인제가하우스 뮤지엄 조성 및 운영, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

붙임: 1. 설계변경 시행 방침 1부.

2. 설계변경 시방서 및 설계서 1부.  끝.

주무관	곽순길		시설과장	10/23 국중연
협조자	총무과장	연규승
시행	시설과-6513	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55	/	www.museum.seoul.kr
전화	02-724-0123	/전송	02-724-0244	/	soongilk@seoul.go.kr	/	대시민공개