문서번호	시설과-6546
결재일자	2015.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	추진반장	관리부장	서울대공원장
김용주	유인행	심상원	10/23 송천헌
협 조

야행관 리모델링 설계용역 준공기한 연기보고

2015. 10

(기반시설안전추진반)

야행관 리모델링 설계용역 준공기한 연기보고

야행관 리모델링 설계용역 시행중 정밀안전진단 시행에 따른 설계용역 지연으로 다음과 같이 설계용역 기간을 연장하고자 함

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 야행관 리모델링 설계용역

□ 용역기간 : 2015. 6. 29 ~ 2015. 10. 26

□ 계 약 자 : ㈜방총건축사사무소 대표 이창훈

□ 계약금액 : 금84,902,616원

□ 주요용역내용

○ 건축물 리모델링 : 지상1층, 연면적 622.20㎡

○ 외부방사장 신설 : 321㎡

○ 야행관 동물 이동에 따른 동양관, 남미관 보수공사

Ⅱ		준공기간 연기

□ 준공기한 연기 : 40일 연기

□ 계약금액 : 변경없음

□ 변경기한

구 분	변 경 사 항
	당 초	변 경
용역기간	2015. 6. 29 ~ 2015. 10. 26	2015. 6. 29 ~ 2015. 12. 5

□ 준공기한 연기사유

○ 건축물 정밀안전진단 시행에 따라 리모델링 건축계획에 영향을 주어 설계용역 지연으로 추가 과업기간 필요

※ 정밀안전진단 용역기간 : 2015. 7. 28 ~ 2015. 9. 5(40일간)

□ 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책 : 서울대공원)

Ⅲ		보고자 의견

□ 위와 같이 준공기한을 연기하여 설계용역의 만전을 기하고자 합니다

따로붙임 : 야행관 정밀안전진단용역 계약서 1부. 끝.