투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	서울숲공원 유아숲체험장 조성공사 기간연장 의뢰

서울숲공원에서 시행중인 『서울숲공원 유아숲체험장 조성공사』와 관련 아래와 같이 준공기한을 연기요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 계약내용

가. 공 사 명 : 서울숲공원 유아숲체험장 조성공사

나. 도 급 액 : 금82,179,000원(일금팔천이백일십칠만구천원)

다. 공사기간 : 2015. 08. 17 ~ 2015. 10. 30

라. 도 급 자 : (주)태원녹화양행 대표 김규태

마. 공 정 율 : 90%

2. 연기요청 기간

구 분	당 초	변 경
기 간	2015. 08. 17 ~ 2015. 10. 26	2015. 08. 17 ~ 2015. 11. 06

3. 연기사유 귀책소재 : 발주처

4. 지체상금 부과여부 : 미부과

5. 연기사유 : 별첨 연기사유 참고

따로붙임 : 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	서울숲공원관리사무소장
주무관	김윤수		시설팀장	현호재		서울숲공원관리사무소장	10/23 배정복
협조자
시행	서울숲공원관리사무소-6075	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273	/
전화	(02)460-2918	/전송	(02)460-2930	/		/	대시민공개