보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	손현정	이경희	10/23 이자화

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여  급수공사 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

▢ 현 황

연번	위 치	공사개요	작업지시 번호	비 고
1	*************	D=25mm, L=4m 부설	신설-89번
2	************	D=30mm, L=4m 부설	신설-96번

▢ 보고 내용

○ 상기 신축건물 급수공사 관련 작업지시를 하였으나, 건축공정이 지연되고 공사 현장에 자재 적치로 인해 수요가가 급수공사 연기원을 제출하여 불가피하게 급수공사를 연기

하여야 할 실정임

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 신축건물 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
신설-89번	’15.10.15 ~ ’15.10.26	’15.10.15 ~ ’15.11.20
신설-96번	’15.10.20 ~ ’15.10.30	’15.10.20 ~ ’15.11.30

붙임 : 상수도공사 연기원 1부.(별도첨부)  끝.