문서번호	방재안전시설부-479
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재안전시설부장
송민영		代오수양	01/10 박종웅
협 조

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

휴일 작업계획 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

휴일 작업계획 검토보고

『서남물재생센터 시설현대화사업』과 관련하여 1월 휴일(토, 일요일) 작업시행에 대한 검토 보고임.

□ 보고내용

○ 관련근거 : 도화(서남) 2014 – 8(2014.01.09)

○ 보고내용 : 휴일작업계획

◦ 휴일 작업계획

- 서남시설현대화사업

작업일시	작업내용	검토내용	시공사 근무계획	감 리 근무계획	비고
01월11(토)	가시설 작업 (Sheet-pile)	′14년2월25일 준공예정으로 공기부족	현장대리인 외 11명	유택상
01월12(일)			현장대리인 외 3명	김정현
01월18(토)			현장대리인 외 9명	장순건
01월19(일)			현장대리인 외 4명	김정현
01월25(토)			현장대리인 외 12명	유택상
01월26(일)			현장대리인 외 6명	장순건

□ 관련규정 검토

○ 공사계약특수조건 제11조

- 일반조건 제18조제1항의 규정에 의하여 계약담당공무원이 계약상대자의 휴일 또는 야간작업을 승인한 경우 휴일 및 야간작업을 위하여 발주기관 또는 공사 감독관의 감독이 필요한 경우 이로 인하여 발생하는 추가 비용은 계약상대자의 부담으로 하되, 그 부담액은 당사자간에 협의하여 결정한다.

○ 감리업무수행지침서 감리원근무수칙

- 상주감리원은 발주청의 요청이 있는 경우에는 초과근무를 하여야 하며, 시공자가 발주청의 승인을 득하여 초과근무를 하는 경우에는 초과근무를 하여야 한다. 이 경우 대가지급은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률」에 의한 회계예규(기술용역계약일반조건)에서 정하는 바에 따른다.

○ 기술용역계약일반조건 제46조

- 상주감리원은 시공자가 발주기관의 승인을 얻어 휴일 또는 야간작업을 하는 경우에는 휴일 또는 야간작업을 하여야 한다

○ 공사계약 입찰안내서(공사계약 특수조건Ⅲ 제46조)

- 휴일, 야간작업으로 감리비 증가시 계약상대자(시공사) 부담

- 계약상대자 부담금액은 기성 또는 준공금액에서 원천 공제하여 구상할 수 있음.

□ 조치의견

◦ 승인된 작업내용 및 현장대리인, 안전관리자, 품질관리자가 상주하여 근무하는 조건 및 책임감리 휴일(야간)근무 및 대가지급 개선계획【본부장방침. 토목부-3059(′10.3.28)】에 따라 시공사에서 감리대가를 부담하는 조건으로 휴일작업 계획을 승인하여 공정관리에 만전을 기하고자 합니다. 【감리대가기준 = 감리사보 × 1.5(할증)】

첨부 1. 책임감리 휴일(야간)근무 및 대가지급 개선【본부장방침. 토목부-3059(′10.3.28)】 1부.

2. 휴일작업 승인요청서 1부.(별도첨부).  끝.