의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-22221
보존기간	년
결재일자	2015.10.23.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		토목총괄과장	토목부장	시설국장		결재
장기철		서관석	노우성	10/23 형태경
협 조
	주무관				오열상

제 목	행정사무감사 요구자료 제출(요구번호 73번, 김동율 의원, 도시안전건설위원회)

행정사무감사 요구자료를 따로붙임과 같이 제출코자 합니다.

붙  임 : 행정사무감사 요구자료 1부.  끝.

김동율 의원(도시안전건설위원회, 새정치민주연합)

73. 월드컵대교 건설공사 관련

1) 사업개요[위치/규모/사업기간/총사업비(국비/시비 구분)]

2) 착공 후 ~ 현재까지 연도별, 항목별 예산투입현황

3) 계획수립 후 ~ 현재까지 추진실적(상세히)

4) 자료작성일 현재기준 계획공정율, 실적공정율, 계획대비 실공정비율

5) 착공 후 ~ 현재까지 차수별 설계변경 내역

[변경차수/공사기간(당초, 변경)/공사금액(당초, 변경, 증감액)/변경내역/변경사유] 변경사유는 구체적으로 상세히 작성

6) 물가변동에 의한 계약금액조정(ES), 모든 회차 설계변경 이력, 상세내역서, 사유서

73. 월드컵대교 건설공사 관련

1) 사업개요[위치/규모/사업기간/총사업비(국비/시비 구분)]

○ 사업위치 : 서울시 마포구 상암동 ~ 영등포구 양평동

○ 사업기간 : 2010. 3.22. ~ 2020. 8.31.

○ 사업규모 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1.98km 교량 신설

- 주경간교 855m(비대칭복합사장교540m+강박스거더315m)

- 접속교 1,125m(남단418m, 북단212m, 지하차도 495m)

○ 총사업비 : 2,589억원(전액 시비)

2) 착공 후 ~ 현재까지 연도별, 항목별 예산투입현황

(단위 : 백만원)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
공사비	7,000	9,480	14,287	9,121	9,258	14,200
감리비	500	500	700	800	700	800
폐기물처리비	0	20	2	79	42	0
계	7,500	10,000	15,000	10,000	10,000	15,000

3) 계획수립 후 ~ 현재까지 추진실적(상세히)

○ ‘97.9. ~ ‘98.12. : 타당성조사 및 기본계획용역 시행

○ ‘01.02.10. : 현상공모 당선작 선정

○ ‘01. 9. ∼ '06.12. : 기본 및 실시계획용역 시행

○ ‘09. 1.19. : 월드컵대교 추진계획 결정(부시장방침 제18호)

○ ‘09. 9. 9. : 도시계획시설 결정(서고시 제2009-328호)

○ ‘10. 3.22. : 공사착공

○ ‘11.01.    : 북단IC 현장타설말뚝 조성

○ ‘11.05.31. : 강교조립장 조성공사 완료

○ ‘14.12.    : 수상구간 우물통가설 및 교각시공완료(15기)

○ ‘15.10.    : 수상 주두부, 북단접속교 및 연결로 시공, 분류하수관 보호공 시공

4) 자료작성일 현재기준 계획공정율, 실적공정율, 계획대비 실공정비율

○ 계획공정율(24.7%), 실적공정율(24.7%), 계획대비 실공정비율(100%)

※ 9월 30일 기준 공정율임

5) 착공 후 ~ 현재까지 차수별 설계변경 내역

[변경차수/공사기간(당초, 변경)/공사금액(당초, 변경, 증감액) /변경내역 /변경사유] 변경사유는 구체적으로 상세히 작성

구 분	공사기간		공사금액(백만원)			변경내역	변경사유
	당초	변경	당초	변경	증감
1회	2010.03.22. ~2015.08.22	2010.03.22. ~2015.08.22	158,496	164,006	5,510	물가변동 1회 북단IC 진입로설치, 주탑 이중 가물막이 가시설 변경 외 5건	물가변동, 민원, 현장여건반영
2회	2010.03.22. ~2015.08.22	2010.03.22. ~2015.08.22	164,006	170,391	6,385	물가변동 2회 분류하수관 보호공, 주탑 가물막이 공사중 계측 외 9건	물가변동, 공법변경
3회	2010.03.22. ~2015.08.22	2010.03.22. ~2015.08.22	170,391	171,022	631	오염수 처리, 축중기 설치, 북단IC 수목이식 외4건	현장여건반영
4회	2010.03.22. ~2015.08.22	2010.03.22. ~2015.08.22	171,022	176,063	5,041	물가변동 3회 북단IC 지장물이설(토목), 수목이식 분류하수관 보호공 변경 외12건	물가변동, 현장여건반영 공법변경
5회	2010.03.22. ~2015.08.22	2010.03.22. ~2015.08.22	176,063	176,826	763	항로표지(등부표) 설치, 두부보강 변경, 매립폐기물처리 외 10건	현장여건반영 공법변경
6회	2010.03.22. ~2015.08.22	2010.03.22. ~2020.08.31	176,826	176,766	-60	북단IC 횡배수관 변경설계, 북단IC 임시가설도로 반영, 매립폐기물 처리방법변경 외 9건	현장여건반영

6) 물가변동에 의한 계약금액조정(ES), 모든 회차 설계변경 이력, 상세내역서, 사유서

○ 물가변동에 의한 계약금액 조정내역

(단위 : 백만원)

구 분	금 액	지수조정율(K치)	설계변경 이력
1회	4,582	3.08%	- ‘11.02.15 : 물가변동 반영 요청 - ‘11.06.01 : 물가 변동 반영 승인
2회	5,155	3.77%	- ‘11.11.10 : 물가변동 반영 요청 - ‘11.12.29 : 물가 변동 반영 승인
3회	5,383	3.84%	- ‘13.12.10 : 물가변동 반영 요청 - ‘13.12.31 : 물가 변동 반영 승인

○ 상세내역서 : 붙임

○ 물가변동 발생사유

- ‘지방자치단체 공사계약 일반조건’의 제7절의 3항『물가변동으로 인한 계약금액 조정』에 따라 계약 체결한 날로부터(2차 이후의 경우 직전 조정기준일)90일 이상 경과하고, 산출된 지수조정률이 100분의 3 이상 증가되어, 조정보고서 제출 후 지수조정률(K치)확정 → 계약금액 조정함.

붙임 : 상세내역서 1부.  끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	서관석
	☎ 3708-2546	담당자	장기철
	작 성 일 : 2015. 10.

이곳에 본문을 입력하세요

이곳에 본문을 입력하세요